투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	설비부장
(경유)
제목	물품계약서 송부(장충체육관 리모델링 통신공사 통합배선설비)

1. 설비부-4907(2014.05.09.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 조달물품 납품기한 연기 요청에 대하여 아래와 같이 변경계약체결되었기에 물품계약서를 송부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 관급자재(통합배선설비) 구매의뢰(장충체육관리모델링 통신공사)

나. 변경계약체결 현황

구 분	당 초	변경	비 고
계 약 자	㈜오성정보통신 (#######	변경없음
계약금액	176,902,000원	변경없음
납품기한	2014.06.02	2014.08.31

붙 임 : 물품계약서 1부. 끝.

	건설총괄부장
주무관	이상일		경리과장	최영미		건설총괄부장	05/28 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-9610	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 2동3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2372	/전송	02-3708-2365	/	bestman@seoul.go.kr	/	부분공개(6)