문서번호	토목부-10278
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이병환		명경출	05/29 노우성
협조
	주무관		박근우

폐기물  처리용역 설계변경(전체,2차) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

토  목  부

폐기물 처리용역 설계변경(전체,2차) 검토보고

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 폐기물 처리용역)

『서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 폐기물 처리용역』의 계약자로부터 물량변경에 따른 설계변경 요청에 대한 검토보고

○ 전체분, 당초 : 577,700천원  ⇒  변경 : 605,700천원 (증28,000천원)

□ 관련근거

◦ 한국종합2014-05-373호(2014.05.26)건설폐기물 처리용역 설계변경 요청

□ 용역개요

◦ 용역개요 : 총물량 28,953톤(폐콘크리트22,863톤, 폐아스콘5,890톤, 건설폐재류200톤)

◦ 용역기간 : 전체 2012. 7. 5 ~ 2014.12.31., 2차 2013. 7.30 ~ 2014.05.31

◦ 용 역 비 : 전체577,700천원                 2차 418,400천원

◦ 용 역 사 : ㈜신명외 1개사

◦ 감 리 사 : ㈜한국종합기술외 1개사

□ 감리단 보고내용

◦ 당초 두무개길 옹벽이 L형 옹벽에서 중력식 옹벽으로 변경됨에 따른 물량        및 신상도 지하차도 확장공사 폐기물 추가됨에 따른 변경 보고

◦ 주요변경 내용

- 전체분

공 종	규격	단위	당초	변경	증․감	비고
1. 폐기물 운반비
폐콘크리트	L=26.8㎞	톤	22,863	23,523	660
폐콘크리트	L=16.0㎞	톤	-	-	-
폐아스콘	L=26.8㎞,덩어리	톤	2,257	2,257	-
폐아스콘	L=26.8㎞, 절삭	톤	3,633	3,633	-
건설폐재류	L=26.8㎞	톤	200	583	383
혼합폐기물		톤	-	74	74
2. 폐기물 처리비
페콘크리트		톤	22,863	23,523	660
폐아스콘	덩어리	톤	2,257	2,257	-
폐아스콘	절삭	톤	3,633	3,633	-
건설폐재류	L=26.8㎞	톤	200	583	383
혼합폐기물		톤	-	74	74

- 2차분

공 종	규격	단위	당초	변경	증․감	비고
1. 폐기물 운반비
폐콘크리트	L=26.8㎞	톤	18,080	19,109	1,029
폐콘크리트	L=16.0㎞	톤	-	-	-
폐아스콘	L=26.8㎞,덩어리	톤	1,641	1,296	-345
폐아스콘	L=26.8㎞, 절삭	톤	753	307	-446
건설폐재류	26.8㎞	톤	200	-	-200
2. 폐기물 처리비
페콘크리트		톤	18,080	19,109	1,029
폐아스콘	덩어리	톤	1,641	821	-345
폐아스콘	절삭	톤	753	307	-446
건설폐재류		톤	200	0	-200

◦ 전체 및 2차 용역비 변경 현황                                 (단위:천원)

공 종	당 초	변 경	증 · 감	비 고
전체 3회	577,700	605,700	증28,000
2차 3회	418,400	418,400

□ 보고자 조치의견

◦ 감리단이 제출한 사항 검토결과, 폐기물 발생 물량 변경에 따라 전체분        및 2차분 내역 변경된 사항으로, 상기 보고 내용과 같이 설계변경 진행       하고자 함.

붙임 : 감리검토의견서, 내역서 및 합의서 각1부.  끝.