투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「N서울타워 영상설비 프로젝터 수리」지연배상금 부과

1.  「N서울타워 영상설비 프로젝터 수리」와 관련하여 완수기한을 경과하여 완수확인요청서를 제출한 업체에 대해 지방계약법 시행령 제90조(지연배상금) 의거, 다음과 같이 지체상금을 부과(징수)하고자 합니다.

가. 공 사 명 : N서울타워 영상설비 프로젝터 수리

########################

#########################################################

다. 계약금액 : 금12,673,760원

라. 지연일수 관련사항

- 완수기한              : 2014. 05. 05.(공휴일 5/5~5/6)

- 완수확인요청서 제출일 : 2014. 05. 26.

- 감독부서 완수검사일    : 2014. 05. 26.

- 지연일수              : 19일 (′14.5.8 ~ ′14.5.26)

마. 지연배상금 : 금602,000원

- 12,673,760원 × 2.5/1,000 × 19일= 602,000

바. 부과방법 : 세외수입고지서 납부

- 예산과목(예산코드) : 위약금(228-03)

- 세입과목(세입코드) : 위약금및지체상금(228301).  끝.

주무관	길민하		공원운영과장	05/29 김준현
협조자	재무팀장	한선
시행	공원운영과-10261	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5931	/전송	02-3783-5929	/	goodhaha@seoul.go.kr	/	부분공개(6)