투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	대표건설(주) 대표 이상훈(150-833 서울특별시 영등포구 도영로 80 대우미래사랑 101동 204호)
(경유)
제목	2014년 남산 및 산하공원 시설물 보수,정비공사(단가계약)』작업기간 연기 통보

1.『2014년 남산 및 산하공원 시설물 보수,정비공사(단가계약)』관련 작업지시(건축-1,2차)한 사항에 대하여 아래와 같이 작업기간을 연기하오니, 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 남산 및 산하공원 시설물 보수,정비공사(단가계약)

나. 도 급 자 : 대표건설(주)  대표 : 박종현

다. 작업내용 : 작업지시 1,2차(건축부분)

라. 작업기간 : - 당초 2014.04.19. ~ 2014.05.30

- 변경 2014.04.19. ~ 2014.06.19. 끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	김광기		시설팀장	김영백		시설과장	05/29 함석주
협조자
시행	시설과-3753	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5961	/전송	02-3783-5969	/	korea114@seoul.go.kr	/	대시민공개