문서번호	방재시설부-3846
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		정일환	05/29 박종웅
협조
	주무관		강종희

「경의선숲길 공원조성공사」

연남동 종점부 석축쌓기 실정보고 검토

2014. 5.

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』

연남동 종점부 석축쌓기 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 연남동 종점부 사면안정을 위한 석축쌓기

검토 보고임

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2014 – 244(2014.5.26)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : ’13. 9. 30 ~ ’16. 3. 31

○ 공 사 비 : 11,812백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 실정보고 사유

- 『경의선숲길 공원조성공사』연남동 종점부 Sta.No.6+750구간 U형측구 설치

위치에 폐기물이 적치되어 폐기물 처리 후 성토 및 U형측구 설치할 경우,

강우시 U형측구 하부로 우수유입, 세굴발생 및 U형측구 전도의 우려가

있으며,

- 상기 구간은 소교목 식재구간으로 소교목의 식재가 가능한 법면경사의

확보를 위해 옹벽 등의 구조물 설치가 필요함.

○ 현장전경 및 단면도

현장전경	단면도

○ 법면경사 검토

- 법면의 안정 및 수목 식재를 위해 법면경사 확보가 필요함.

구 분	법면경사(6+720)	장 · 단점	검토안
당초설계 (1안 1:3.7)		- 설계사면유지 및 사면안정성 양호 - 옹벽높이 다소 과다
옹벽미설치 (2안 1:1.2)		- 사면안정성 확보 어려움 - 수목식재 불가
관목식재안 (3안 1:2.0)		- 관목은 식재가능,소교목은 식재불가 - 사면안정은 유지됨
소교목식재안 (4안 1:3.0)		- 소교목까지 식재가능 - 사면안정성 양호 - 옹벽높이 다소 과다	〇

○ 법면경사 확보방안

구 분	단 면	개략공사비	장 · 단점	검토안
석축 쌓기		23만/m	- 시공이 빠르다 - 토공량이 적다	〇
보강토 옹벽		54만/m	- 시공이 빠르다 (검토기간 소요) - 부지소요면적이 적다 - 토공량이 과다
L형 옹벽		61만/m	- 안정성이 높다 - 공사기간 길다 (검토기간 소요) - 토공량이 과다

○ 수량검토

구 분	단 위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
토 공
터파기/육상토사(기계,3~4m)	㎥	4,142	5,974	1,832
되메우기/토사	㎥	2,390	3,042	652
유용성토	㎥	5,374	6,553	1,179
2. 우수공
플륨관(D250mm)	m	147	224	77
3. 구조물공
석축쌓기	㎡	-	215	215
4. 지급자재
레미콘(25-18-8)	㎥	116	165	49	관급

○ 공사비검토

- 당초내역비목 : 도급단가 적용

- 신규 비목 : 신규단가×낙찰율(80.013%) 적용

(단위 : 백만원)

공 종	당 초	변 경	증 · 감	비 고
토 공	37	48	11(증)
2. 우수공	2	3	1(증)
3. 구조물공	-	19	19(증)
4. 제경비	18	32	14(증)
5. 개략공사비	57	102	45(증)

Ⅲ

감리단 검토의견

○ 연남동 종점부 Sta.No.6+670 ~ 6+750구간은 부지경계를 따라 가옥이 위치하고 있으며 설계에 의해 시공할 경우 U형측구의 전도우려가 있으므로 U형 측구를 기존 지반의 높이에 시공하고

○ 법면은 상기 구간이 소교목 식재구간이므로 소교목의 식재가 가능한 법면경사의 확보(1 : 3)를 위한 구조물의 적용은 토공량(터파기)이 적고, 시공이 빠르며 공사비가 비교적 저렴한 석축을 적용하고 단가는 신규비목임을 감안 신규단가×낙찰율을 적용함이 타당함.

Ⅳ

검토결과

○ 연남동 종점부 Sta.No.6+670 ~ 6+750 구간 U형측구 설치 위치 변경 및 상기 구간의 소교목 식재를 위한 법면 경사의 확보(1 : 3)방안으로 석축쌓기에 대한 감리단 의견이 적정하다고 판단되어 공사의 시급성을 감안, 승인 통지코자 하며,

○ 변경된 개략공사비에 대해서 토목분야 설계변경 소위원회 심의를 거쳐 차후 설계변경시 반영토록 감리단에 통보코자 함.

붙  임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.