함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의회 개최［2013년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 소화전신설,보수공사(장기계속단가계약)］ -설계변경(최종)

우리 사업소에서 시행중인 “2013년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)”에 대하여 당초 계약물량 외 신규공종 발생 및 물량 증․감 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 2013년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)

○ 주요 변경물량

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	고정밸브대제작설치(3.5m이하)	38개소	0	감
	사다리제작설치(3.5m이하)	36개소	0	감
	소화전신설	49개소	72개소	증
	소화전철거	37개소	57개소	증
	부단수활정자관분기(100mm)	41개소	23개소	감
	타일붙이기(200*200,두께18mm)	161㎡	0	감
	타일붙이기(250*400,두께18mm)	408㎡	0	감

○ 계약기간 : 2013.07.05 ~ 2014.05.30

○ 도급비 변경내역

- 당   초 : 금551,592,230원

- 변경 후 : 금533,170,000원

○ 계약업체 : 은진이앤씨(주) 대표 이수일

나. 심의회 개최

○ 심의일정 : 2014. 05. 29(목)  16:00

○ 심의장소 : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의의원 : 시설7급 김종필, 시설7급 강대유, 시설7급 이문성, 시설7급 유광창

다. 심의내용

○ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

○ 위 사항을 검토 및 심의하고 심의 결과에 의거 설계변경 조치

따로붙임 :  1. 설계변경 심의신청서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	이승완		급수운영과장	전결 05/29 김수영
협조자
시행	급수운영과-10724	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로935(번동) 북부수도사업소 급수운영과(4층)	/
전화	3146-3370	/전송	3146-3389	/	lsw6531@seoul.go.kr	/	대시민공개