투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기요청(수락고가교외 1개소 보수보강공사 폐기물처리용역)

우리 사업소에서 시행중인 [수락고가교외 1개소 보수보강공사 폐기물처리용역]의 준공기한을  아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공  사  명 : 수락고가교외 1개소 보수보강공사 폐기물처리용역

나. 계약상대자 :  ㈜디엘이엔에스 대표이사 한성섭외 1

다. 준공기한 연기

- 당  초 : 2013. 12. 31 ~ 2014. 05. 30

- 변  경 : 2013. 12. 31 ~ 2014. 06. 30

라. 연기  사유 : 수락고가교외 1개소 보수보강공사의 공사기한에 맞춘 폐기물처리용역의 기간연장

마. 귀책  사유 : 서울특별시

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 보고서 1부. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이정원		교량보수과장	05/29 이인섭
협조자
시행	교량보수과-3741	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 (번동 365-1) 북부도로사업소	/
전화	02) 944-5493	/전송	02) 945-5013	/	dlwjddnjs.seoul.go.kr	/	대시민공개