문서번호	정수시설과-2646
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
고재연		김구식	05/29 정남기
협조
	주무관		김근태A

「영등포 1정수지 내부방식공사」

설계변경에 따른 기술심의실무위원회 개최

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

「영등포 1정수지 내부방식 공사」

설계변경에 따른 기술심의 실무위원회개최

『영등포 1정수지 내부방식공사』를 시행중 기술협약 해제에 따른 바닥자재를 당초 부착식에서 도막식 공법으로 설계변경사항이 발생하여 우리시 규정에 의거 설계변경기술심의실무위원회를 개최하여 심의코자 함.

※ 본부장방침 ‘감사과-10414(’13.12.18)’호 상수도 청렴문화 정착을       위한 업무개선 추진계획에 의거

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 영등포 1정수지 내부방식 공사

□ 사업개요

○ 방식면적 : 15,350㎡(1차 7,323㎡, 2차 8,026㎡)

- 도 막 식 : 천정 및 벽체 10,328㎡(1차 4,936㎡, 2차 5,392㎡)

- 부  착  식 : 바닥 5,021㎡(1차 2,387㎡, 2차 2,634㎡)

□ 공사기간 : 2013.9.25. ~ 2014.12.18

□ 공사금액 : 1,967,901,200원

- 도급비   908,168,200원

- 관급비 1,059,733,000원

□ 도 급 자 : ㈜엘씨엠이엔지 대표 박미애

Ⅱ		추진 현황

○ 5.2  : 내부방식공사 공법계열 선정(내부심사, 센터)

- 벽체・천정 : 도막식, 바닥 : 부착식

○ 7.2  : 공법별 기술심의위원회 심의 평가개최 및 선정

※ 도막식 우백건설(주),  부착식 매일종합건설(주)

○ 8.22~29 : 공사계약의뢰 및 입찰공고(신기술 특허 사용협약서 체결)

○ 9.23 : 공사계약 체결 ㈜엘씨엠이엔지 대표 박미애

○ 11.7 : 부착식공법 특허사용 기술협약 해제 지시

- 부착식공법 민원발생으로 실태조사 결과 조치

○ 11.12 : 민원 실태조사 결과(기술협약 해제)통보

(센터⇒매일종합건설(주))

○ 11.25 : 지위보전가처분신청(서울중앙지방법원) 매일종합건설(주)

○ ‘14.3.19 : 기각 판결(서울중앙지방법원)

○ ‘14.4.3 : 기술협약 해제에 따른 기술자문위원회 개최

- 바닥 : 특허 부착식 ⇒ 범용 도막식(벽체와 천정에 사용한           유사한 제품) 공법 변경.

○ ‘14.4.3 : 기술협약 해제에 따른 기술자문위원회 개최

○ ‘14.5.27 : 설계변경 방침(부본부장)

Ⅲ		설계변경 기술심의 실무위원회 개최

□ 개최사유 : 설계변경 내용에 관한 건.

- 총공사비 5억이상~20억미만 공사의 설계변경

□ 심의내용 :

※ 5천만원이상 증액 및 주요변경사항 심의

- 바닥자재 공법변경에 따른 물량증감 적정성

- 관급자재를 사급자재로 변경 적정성

- 기타 설계변경 적정성

□ 일   시 : 2014. 5. 30(금) 9:00 ~ 12:00

□ 장   소 : 영등포아리수정수센터 2층 회의실

□ 위원회 구성

○ 구성인원 : 총 8명

- 위 원 장 : 영등포아리수정수센터 소장

- 심의위원 : 7명 (내부위원 3명, 외부전문가 4명)

○ 위원 선정

- 강북아리수정수센터 정수과장, 북부수도사업소 급수운영과장,

서부수도사업소 현장민원과장,

서울시 건설기술 심의위원 : 이섬범, 유병학. 배기선, 김규용.

※ 실정을 파악하고 있는 기 참여하였던 위원위주로 구성

Ⅳ		행정 사항

□ 기술심의위원 연락

○ 통지방법 : 공문, 유선 및 메시지 발송

□ 소요예산 : 600,000원 (위원회 참석수당)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

○ 산출근거 : 4명 × 150,000원 = 600,000원

※ 공무원은 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 미지급

붙  임  1. 설계서 및 기타 물량 변경내용 1부.  끝.