문서번호	지리정보과-1684
결재일자	2014.5.30.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

		시 민
주무관	지리정보과장	시설안전부장
최은옥	오기석	전결 05/30 代강신재

GIS DB관리 SW 업그레이드 관련

1차 사전 점검 결과 및 향후 작업계획 보고

2014. 5.

상수도사업본부

(지리정보과)

GIS DB관리 SW 업그레이드 관련

1차 사전 점검 결과 및 향후 작업 계획 보고

상수도 GIS DBMS(오라클)을 업그레이드 한 후 발생될 수 있는

문제를 사전에 파악하고 조치하기 위하여 상위 버전의 테스트 환경을 구축하고 진행한 1차 기능점검 결과 및 향후 작업 계획을 보고함.

※ 관련근거 : 지리정보과-838호(「GIS DB 관리 SW 업그레이드 계획」, 2014. 4.22.)

Ⅰ		1차 점검 개요

❍ 작업기간 : 4.17.(목) ~ 5.26.(월)

❍ 작업대상 : 테스트 DB서버 및 Web서버

❍ 작업목적

- 업그레이드 된 환경(OS 및 DB)에서 GIS 기능 이상유무 파악 및 예상 작업

소요시간 등의 측정을 통하여 DB 업그레이드에 대한 전반적인 상황 예측

❍ 작업내용

- 상위 버전의 테스트 DB서버 및 WEB서버 구축

- 테스트 시나리오에 의거 GIS 프로그램 기능 정상유무 체크

- 오라클 예방보수 보고서 분석을 통한 DB 정비

❍ 작업자

- 전산정보과 장비담당 및 유지보수 업체 엔지니어 2인

- 지리정보과 GIS담당 및 유지보수 업체 개발자 2인

Ⅱ		1차 추진 결과

❍ 사전 점검 수행결과

- GIS 프로그램들은 정상적으로 작동하나, 테스트 DB서버와 실제 운영DB

서버의 일부 정보들이 일치하지 않아 2차 점검 진행 예정

❍ 추진경과

- 4.17.(목) : 실 운영 서버와 동일한 환경의 테스트DB 서버 구축

(운영체제: Sun OS 5.9, 데이터베이스: 오라클 9i)

- 4.22.(화) : OS 업그레이드(Sun OS 5.10) 및 GIS 정상작동 유무 점검

- 4.24.(수) : DB 업그레이드(오라클 11g)

- 4.29.(화) : 암호화 모듈 설치

- 5.9.(금) ~ 5.20.(수) : 오라클 Preventive Maintenace Report 분석

Oracle Preventive Maintenace Report : 오라클 유지관리 보고서

및 Invalide Object 정비

Invalide Object : 실행안 되는 스크립트

- 5.1.(목) ~ 5.26.(월) : GIS 내 모든 단위 프로그램 기능 테스트

- 5.29(목) : 기능점검 결과를 토대로 전산정보과 3차 협의

❍ 점검방식

- GIS 프로그램 : 테스트 시나리오에 의거 기능 점검

- 오라클 설정정보(테이블, 함수, 프로시져 등)

: 오라클 Preventive Maintenace Report에 의거 Object 정비

❍ 점검 및 정비내용 : [붙임1], [붙임2] 수행보고서 참고

Ⅲ		2차 점검 계획

❍ 작업기간 : 5.29.(목) ~ 6.11.(수)

❍ 작업목표 : 테스트 DB서버와 실 운영 DB서버의 오라클 Invalide Object

불일치 원인분석 및 GIS DB 유저 권한 조정 후 GIS 기능 점검

❍ 작업일정

- 5.29.(목) : 테스트 DB서버의 기존 자료 삭제 후 5.28.(수) 기준 DB 백업본으로

DB 재구축(오라클 9i로 다시 진행)

- 5.30.(금) ~ 6.2.(화) : 오라클 Invalid Object 분석 및 GIS DB계정 조정

- 6.5.(수) ~6.12.(목) : 오라클 11g로 업그레이드, GIS 기능테스트

❍ 점검방식 : 1차 사전점검 방식과 동일

Ⅳ		향후 계획

❍ 2차 점검(최종점검) 결과를 토대로 실제 운영서버 작업방식 및 작업일정 협의         → 전산정보과와 4차 협의

❍ 본부 및 산하 수도 사업소에 GIS 중단공문 시행

붙임 : 1. 테스트 수행보고서 1부.

2. DB정리 작업보고서 1부.  끝.