문서번호	시설관리과-12660
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강무진		정윤상	05/30 이시우
협조

간선배관 부설 계획 보고

(신내동 344주변 새우개마을 도로개설구간-2구간)

명에의거 관내 지역담당 업무 수행중 도로개설(확장) 구간내 순환배관망 형성을 위한 배관 부설계획을 아래와 같이 보고합니다.

2013. 04.

지방시설주사보  강무진

□ 관련근거

○ 중랑구 도로과-1962(2013.11.29.)호 「새우개마을 진입도로 개설공사 시행 알림」

○ 본부 급수설비과-1262(2014.3.3)호 「2014년 간선배관 사업비 배정통보」

○ 동부 시설관리과-8348(2014.4.11.)호 「간선배관 부설계획 보고」

□ 보고내용

○ 중랑구(도로과)에서 시행하는 새우개마을 도로개설(및확장)구간내 주민 순환배관망형성을       위한 상수도관 부설(신설)계획에 의거 본부에서 예산이 배정되어 공사주친중에 있음

○ 도로개설 공사가 (1,2)단계별 시행 및 주민보상과 관련 도로공사가 지연되고 있어 상수도      부설공사가 도로개설(도시가스 및 하수도부설)과 순차적으로 병행 시행되고 있음

○ 상수도 부설구간 도로개설 현황 및 상수도관 부설현황

구간	위치	연장 (m)	주택철거율 (공정율%)	비고 (보상진행)	상수도 공사현황
1	신내동 278-6호부근	70	100	1단계	공사완료
2	신내동 283-3	60	90	1단계	금회시행
3	신내동 284-9	70	0	2단계
4	신내동 284-2	80	0	2단계
5	신내동 279-5	50	0	2단계
6	신내동 281-1	80	0	2단계
7	신내동 283-5~278-5	210	0	2단계

□ 처리의견

○ 상기와 같은 사항으로, 도로개설이 금회 완료된 2구간(60m)의 원활한 간선배관 공사 추진을       위하여 우리사업소 계약된 연간단가 업체에 작업시행하여 순환배관망 형성 및 향후 주민 맑은       물 공급 업무에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공사현황

- 공사명 : 묵동외7개동 상수도 공사(장기계속공사)

- 공사구간 : 신내동 287-3호 주변

- 공사내역 : D=200mm, L=60m

- 도급비(예정) : 7,200천원

- 예산과목 : 자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비(간선배관)

붙임 : 1. 도로개설에 따른 간선배관 부설계획 (소장)방침서 1부

2. 공사위치도 1부. 끝.