문서번호	산지방재과-5277
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
유진석		조성만	05/30 정중곤
협조
	사무관		오승민

중부녹지사업소 추가 예산 요청에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

푸 른 도 시 국

(산지방재과)

중부녹지사업소 추가 예산 요청에 대한 검토 보고

중부공원녹지사업소에서 시행중인 2014년 예방사방사업(예장동, 이화동) 및 (이태원동, 후암동) 2건에 현장점검 및 공사중 신규 검토된 안전조치사항 등으로 추가 소요되는 사업비를 요청한 사항임.

1. 관련근거 : 중부공원녹지사업소 시설과-3468(2014.05.20)호 및 중부공원녹지사업소 시설과-3696(2014.05.28)호와 관련임.

2. 사업개요

○ 사 업 명 : 2014년 예방사방사업(예장동, 이화동) 및 (이태원동, 후암동) 2건

○ 사업내용 : 보막이, 측구수로, 깬돌수로 등 사방시설물 정비

○ 추가 요청액 : 128,800천원(잔액 65,800천원, 재배정63,000천원)

(단위 : 천원)

구 분	낙찰차액 및 집행잔액(A)			추가소요액(B)	계 (A-B)	비 고
	낙찰차액	집행잔액	소 계
합 계	47,004	18,772	65,776	128,712	-62,936	예산 재배정
예장동, 이화동	29,732	5,011	34,743	99,838	-65,095
이태원동, 후암동	17,272	13,761	31,033	18,874	12,159
폐기물처리용역				10,000	-10,000

3. 추가 정비사항

○ 사   유

- 이화동 폐기물 처리 및 추가공사에 따른 예산 부족분

- 이태원동 기존 배수로 정비 물량 증가

- 배수로 재시공 정비에 따른 현장여건상 물량 증가

4. 조치계획

○ 중부공원녹지사업소에서 시행중인 2014년 예방사방사업(예장동, 이화동) 및 (이태원동, 후암동) 2건에 현장점검 및 공사중 신규 검토된 안전조치사항 등으로 추가 소요되는 사업비를 요청한 사항임.

○ 본 사업의 원활한 진행을 위하여 추가 소요되는 사업비(128,800천원) 중 낙찰차액 및 집행잔액(65,800천원)을 우선 활용토록하고 부족되는 예산(63,000천원)은 재배정하여 시공물량 정산에 만전을 기하고 공사기간 연장 없이 우기전에 완료될 수 있도록 통보코자 함.

붙임 : 1. 예산지원요청 공문 2부.

2. 추가 소요 공사비 요청내용 1부.  끝.