투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	한강난지공원 민간위탁시설 전원분리공사 설계변경 계약의뢰 및 공사기간 연장 요청

1. 총무과-6124(2014.4.25)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 기 계약체결 통보된 한강난지공원 민간위탁시설 전원분리공사에 대한 설계변경 및 공사기간을 아래와 같이 연장코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 한강난지공원 민간위탁시설 전원분리공사

2) 공사기간 :  ‘14. 4. 25 ~ ’14. 5. 31

3) 공사규모 : 야구장 인입공사 1,026m, 캠핑장 회로분리 36등

4) 계약금액 : 33,354,200원

5) 시 공 사 : 해동전설(주)

나. 변경요구사항

구분	변경전	변경후	비고
변경금액	33,354,200원	29,837,000원	감)3,517,200
공사기간	‘14. 4. 25∼5.31	‘14. 4. 25∼6.30	30일 연장

붙임 : 1. 설계내역 1부.

2. 설계변경검토보고서 1부.

3. 합의서 1 부.  끝.

	기전설비1과장
★주무관	강희진		기전설비1과장	05/30 김남수
협조자
시행	기전설비1과-2055	(		)	접수		(		)
우	133-111	서울 성동구 성수1가1동 강변북로 257	/
전화	02-3780-0645	/전송	02-3780-0744	/	jhg815@seoul.go.kr	/	대시민공개