투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	건설폐기물처리용역 설계변경 계약 의뢰(서남분뇨처리시설)

1. 우리 본부에서 시행 중인 『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 건설폐기물

처리용역』의 설계변경을 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 건설폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2012.11.15 ~ 2015.1.31

다. 계 약 자 : 호람산업개발(주)

라. 변경내용                                                  (단위 : 원)

구 분	공사금액			공사기간 (변경없음)	비고
	변경전	변경후	증감
총 차	468,614,000	478,944,000	증)10,330,000	‘12.11.15~’15.01.31	폐기물 추가발생
2 차	4,330,000	10,450,000	증) 6,120,000	‘13.04.07~’15.01.31

마. 변경사유 : 건설오니, 폐토석, 폐콘크리트, 혼한건설폐기물 추가발생

바. 예산과목 : 도시안전실 물재생시설과, 물재생시설 개선 및 관리, 물재생시설 개선,

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업, 시설비 및 부대비, 시설비.

따로붙임 : 1. 설계변경 검토 보고 1부.

2. 설계변경 내역서(전체, 2차) 각1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이호기		환경설비과장	代이호기		설비부장	05/30 박기형
협조자
시행	설비부-5821	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15. 서소문별관 2동 2층	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개