	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	기성검사 통보[동부간선도로 확장공사(2공구)］6차8회

1. 이산2014-2787호(2014.05.29)와 관련입니다.

2. 책임감리원으로부터 제출된 「동부간선도로 확장공사(2공구)」6차제9회 기성검사 결과를 아래와 같이 통보하오니 대금지급 등 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동부간선도로 확장공사(2공구)

나. 도 급 자 : 한라건설(주) 대표 최병수

다. 공사기간 및 계약금액

- 총  차 : 2008.12.30 ~ 2015.12.31(금170,109,500천원)

- 6 차분 : 2012. 1.30 ~ 2014.06.30(금34,866,000천원)

라. 기성검사 금액 :

- 전회까지 기성금액 : 금25,221,000,000원(72.34%)

- 금회(9회) 기성금액 : 금2,192,000,000원(6.29%)

- 기성금액 합계 : 금27,413,000,000원(78.62%)

붙임 : 1). 기성검사 조서 1부

2). 기성내역서 1부(별도 송부).  끝.

	토목부장
주무관	장종환		교량건설과장	代장종환		토목부장	05/30 노우성
협조자
시행	토목부-10452	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 서대문구 충정로3가 동아일보사건물 50	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	3708-2599	/	hjj0128@seoul.go.kr	/	대시민공개