문서번호	조경과-3069
결재일자	2014.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경과장
조진성		05/31 이성주
협조
	주무관		김태극

시설공사 실정사항 검토보고

2014. 5

조 경 과

- 백두산호랑이숲 조성공사 -

실정사항 검토 보고

백두산호랑이숲 조성공사와 관련 지하수‧조절저수지 용수 사용에 대한 실정검토 사항을 보고드림

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사

❍ 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 6. 20

❍ 공 사 비 : 2,520,213천원

❍ 도급업체 : 미래종합조경(주), ㈜신영그린시스

□ 현황 및 조치방안

❍ 맹수사 계류 등 수경시설 가동을 위해 지하수 및 조절저수지 용수 연결이 필요(현안검토회의, ‘13.9.16)

⇒ 단수없이 맹수사로 인입하기 위해 ‘부단수천공법’ 시행

- 본공사 설계변경 물량으로 반영(약5백만원)

부단수천공