문서번호	설비부-4471
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		이흥복	전결 04/25 박기형
협조
	주무관		현승주

『아동복지센터 소방설비(기계) 성능개선공사』

설계변경(정산) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.04.

도시기반시설본부

(설비부)

『아동복지센터 소방설비(기계) 성능개선공사』

설계변경(정산) 검토보고

『아동복지지센터 소방설비(기계) 성능개선공사』감리단으로부터 제출된 설계변경(정산)관련 제경비(보험료 등)에 대한 정산 검토사항을 보고드림

1		공사 개요

❍ 공 사 명 : 아동복지센터 소방설비(기계) 성능개선공사

❍ 공사기간 : 2014. 01. 02 ~ 2014. 05. 01.

❍ 공사규모 : 지하1층/지상2층(연면적:2,307㎡) 소방설비(기계)공사 1식

❍ 공사금액 : 255,996,812원

❍ 시 공 사 : 삼성기계공무㈜

❍ 감 리 단 : ㈜동남엠이씨

2		관련 근거

❍ SSM-본사-2014-0423-01(’14.04.23) : 설계변경(정산)관련 서류제출

❍ 동남 제 2014-413(’14.04.24.) : 제경비 등 정산관련 서류제출

❍ 설비부-2510(’14.03.06.), 3447(’14.04.01), 3781(’14.04.08)

3		설계변경(정산) 내용

❍ 주요 내용

- 직접공사비  : 증 25,312,553원

‣ 간이스프링클러 헤드 및 배관물량 증가, 디퓨져 및 옥내소화전 교체

‣ 신규단가에 대하여 당초 ’13년 품셈적용 일위대가를 ’14년 변경 품셈                  일위대가 적용 반영 : 감 3,541,655원

- 제경비 정산 : 감  3,709,365원

‣고용․산재․국민건강․노인장기요양 보험 및 산업안전보건 관리비 등 정산

❍ 설계변경(정산) 금액                                   (단위:원)

구 분	계약금액	변경(정산)금액	증․감	비 고
직접공사비 (기계분야)	85,074,606	110,380,502	증25,312,553	․ 디퓨져 및 그릴추가(23개소) ․ 간이S/P배관 및 헤드추가 (237m) (89개소) ․ 옥내소화전 주․ 보조펌프 (각 1대) 교체 ․ ’14년 품셈 일위대가 적용
직접공사비 (건축분야)	79,813,121	79,813,121	0
산재보험료	4,057,847	0	감 4,057,847
고용보험료	866,404	0	감 866,404
건강보험료	1,947,263	644,145	감 1,303,118
연금보험료	2,852,168	1,379,160	감 1,473,008
노인장기보험료	127,545	42,135	감 85,410
산업안전보건비	4,089,163	2,737,436	감 1,351,727
건설폐기물	1,834,308	228,127	감 1,606,181
기타간접비	75,322,309	82,356,639	증 7,034,330
합 계	255,996,812	277,600,000	증21,603,188

❍ 감리단 검토의견

- 신규단가에 대하여 당초 ’13년 품셈적용 일위대가를 ’14년 변경품셈

일위대가 적용 반영함이 타당하며,

-  또한, 각종 보험료(실납부) 및 건설폐기물 정산에 따른 설계변경(정산)내역서를

검토한 결과 위와 같이 정산처리함이 타당할 것으로 판단됨

※ 직접공사비 증가사항은 설비부-2510(’14.3.6)호로 기보고 되었던 사항임.

‣ 간이스프링클러 헤드 및 배관물량 증가, 디퓨져 및 옥내 소화전펌프 교체 등

4		보고자 의견

❍ 설계변경(정산)에 따른 감리단 검토 보고내용이 타당한 것으로 판단

되므로 설계변경(정산) 내용을 계약부서인 건설총괄부에 통보하고자 함.

따로붙임 : 1. 감리단 설계변경(정산) 보고서(합의각서 포함)1부.

2. 설계변경(정산)내역서 및 제비율 검증서 각 1부.  끝.