문서번호	자원순환과-7864
결재일자	2014.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
김필동		정연구	05/26 최홍식
협조

강남자원회수시설

소각재 이송장치 교체 공사 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
강남자원회수시설 위탁운영 협약서	계약심사과	공사계약심사	심사금액조정	390,807천원

2014. 5.

기후환경본부

(자원순환과)

강남자원회수시설 소각재 이송장치 교체공사 추진 계획

강남자원회수시설 생활폐기물 소각시 발생되는 바닥재, 비산재, 철재류 운반용 이송장치가 노후로 마모 및 부식되어 고장이 빈번함에 따라 교체하여 시설을 안정적으로 운영하고자 함

□ 근 거

○ 강남자원회수시설 위탁운영용역 과업지시서 제11조(위탁운영비용 집행) 제5호

- 단일사업으로 추정가격 3천만원 초과의 공사등은 서울시 승인

○ 재 이송장치 교체공사 승인 요청(강남HSGN 제2014-167호, 2014.5.12)

□ 현 황

○ 계통도

쓰레기 피트

쓰레기 크레인

소각로 및 폐열보일러

세정탑, 반건식 반응탑

보일러 재이송장치 (1)

백필터 재이송장치(1)

보일러 비산재 이송장치(1)-1,(2)

백필터 재이송장치(2)

쓰레기 처리 계통

재 처리 계통

백필터

화격자 재이송장치 A/B

재배출장치

연소가스 처리 계통

비산재

이송장치(1)

비산재

이송장치(2)

비산재

이송장치(3)

세정탑 재이송장치

반응탑 재 이송장치

소각재 이송장치

(1)(2)

No.	기기번호	명 칭	수량	형 식	최종 보수 년도	용 량
1	C-6X03	소각재 이송장치(1)	3	바이브레이팅 콘베어	‘10. 06.	4톤/hr
2	C-6X04	소각재 이송장치(2)	3	바이브레이팅 콘베어	‘10. 06.	4톤/hr
3	C-6X05A/B	화격자 재 이송장치	6	수조식 체인 콘베어	‘12. 05.	0.4톤/hr
4	C-6X06	보일러 재 이송장치(1)	3	스크류 콘베어	‘13. 07.	0.5톤/hr
5	C-6X06-1	보일러 비산재 이송장치	3	Flight 버켓	‘12. 05.	0.3~0.45톤/hr
6	C-6X07	보일러 재 이송장치(2)	3	체인 콘베어	‘12. 05.	0.7톤/hr
7	C-6X08	반응탑 재 이송장치	3	체인 콘베어	‘13. 07.	2.4톤/hr
8	C-6X09	세정탑 재 이송장치	3	스크류 콘베어	-	0.15톤/hr
9	C-6X10A/B	백필터 재 이송장치(1)	6	체인 콘베어	‘13. 07.	1.0톤/hr
10	C-6011A/B	비산재 이송장치(1)	2	체인 콘베어	‘12. 05.	3.2톤/hr
11	C-6012A/B	비산재 이송장치(2)	2	체인 콘베어	‘12. 05.	5.0톤/hr
12	C-6013A/B	비산재 이송장치(3)	2	체인 콘베어	‘10. 06.	5.0톤/hr
13	C-6X16	백필터 재 이송장치(2)	3	스크류 콘베어	-	2.0톤/hr
14	C-6020	철재류 이송장치(1)	1	벨트 콘베어	‘13. 07.	1.2톤/hr
15	C-6021	철재류 이송장치(2)	1	벨트 콘베어	‘13. 07.	0.6톤/hr
16	C-6022	철재류 이송장치(3)	1	수조식 에이프런	‘13. 07.	1.8톤/hr

○ 시설현황

※ No1,2번 보수예정

▷ No1 소각재 이송장치(1)(C-6X03) - 호기별 설치

- 형식 : 진동식 컨베어(Vibrating Conveyor)

- 크기 : 900W×8,825L

- 처리용량 : 4ton/hr,    - 속도 : 534CPM

▷ No2 바닥재 이송장치(2)(C-6X04) - 호기별 설치

- 형식 : 진동식 컨베어(Vibrating Conveyor)

- 크기 : 900W×5,419L

- 처리용량 : 4ton/hr,   - 속도 : 534CPM

□ 보수예정 설비상태

❍ 연소 후 발생되는 소각재(바닥재)이송을 위한 진동식(바이브레이팅) 이송장치가 호기별 2대(C-6X03,C-6X04)씩 설치되어 운영되고 있음.

❍ 소각재를 이송하는 상판 케이싱의 편마모 현상으로 인해 편하중이 발생되어 하부 균형 막대(Bar)가 자주 파손되고 있음.

❍ 설비의 진동을 유지하는 탄력 소모 부품(스프링, 우레탄 쇼버 등)의 성능이 저하됨.

❍ 스프링 지지대(Spring Bracket)와 프레임 용접부가 부식됨.

바닥재 이송장치	바닥재 이송장치 스프링 및 로드

바닥재 이송장치 상부 바닥	바닥재 이송장치 구동부

□ 공사 시행 계획

○ 사업명 : 강남자원회수시설 소각재 이송장치 교체공사

○ 교체 대상 설비

No.	기기번호	명 칭	수량	형 식	용 량
1	C-6X03	소각재 이송장치(1)	3	바이브레이팅 컨베어	4톤/hr
2	C-6X04	소각재 이송장치(2)	3	바이브레이팅 컨베어	4톤/hr

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(G2B)

○ 참가자격

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 제2항

▷ 특수한기술 또는 공법이 요구되는 공사계약의 경우에는 해당 공사수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 그 공사와 같은 종류의 공사실적에 따라 최근 10년이내 2억원이상 제작·설치 실적이 있는자

※ 운영사에서 필요한 사항은 추가하여 발주할 것.

○ 공사기간 : 계약일로부터 ~ 2014. 10. 30(대정비기간중 교체)

○ 소요예산 : 390,807천원

※ 운영사 설계금액 : 438,595천원

⇒ 계약심사금액 : 390,807천원(감47,788천원, 10.9%)

○ 추진일정

- 2014. 5월 : 입찰공고 및 계약

- 2013. 6월 ~ 9월 : 공장제작

- 2013. 9월 ~ 10월 : 현장 철거 설치(대정비기간 중)

□ 행정사항

○ 운영사 승인 통보

붙임 : 주요심사내역서 및 계약심사결과서 각 1부.