문서번호	은평병원원무과-7859
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
최혁진	이종민	代이종민		05/29 남민
협 조
	약제과장		代강성심
	간호과장		박동림
	진료부장		代이상민

지상주차장 및 비상통로 아스콘 교체 계획

2014. 5.

서울특별시 은평병원

(원  무  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

지상주차장 및 비상통로 아스콘 교체 계획

쾌적한 병원환경 조성과 균열로 인한 안전사고 예방을 위하여 노후 및 훼손된 지상주차장과 비상통로의 아스콘을 교체하여 우리병원 시설기능 유지에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현황 및 문제점

총괄현황

❍ 시설개요

- 대지위치 : 서울시 은평구 백련산로 90 (응암동 232-3 외3필지)

- 면    적 : 대지면적 10,905㎡, 연면적 18,140.51㎡, 건축면적 3,032.72㎡

- 주 용 도 : 의료시설 (종합병원)

- 준공일자 : 2001.12.17 (어린이발달센터 2010.12.27)

- 허가병상 : 305병상 (5개병동 48병상, 1개병동 50병상, 야간진료 15병상)

❍ 아스콘포장 현황

- 총 면 적 : 3,172㎡

- 포장범위 : 지상주차장(진입로 포함), 건물뒷편 비상통로

문제점

❍ 지상주차장 바닥 아스콘 균열 및 훼손으로 인한 차량·인명 안전사고 위험

❍ 비상통로 아스콘 노후에 따른 휠체어 안전(32병동) 사고 위험

❍ 의료시설 및 사회복지시설 안전관리 실태 점검(2013.2, 감사담당관 주관)

및 공공 다중이용건축물 정기점검(연2회, 도시기반시설본부 주관) 시 반복 지적

❍ 주차관제설비 설치위치 잘못으로 차량통제 및 공간활용 문제발생

❍ 현장사진

병원정문 차량진입로	병원정문 보행자도로
주차장 바닥(어린이발달센터 방향)	주차장 바닥(24시간진료실 앞)
비상통로 바닥(32병동 출입구)	비상통로 바닥(비상출구 앞)

Ⅱ		추 진 계 획

공사개요

❍ 작업공정 : 아스콘 철거 및 포장공사, 폐기물 처리, 주차관제설비 이설

❍ 공사범위 : 아스콘 포장 3,172㎡, 주차관제설비 1식

❍ 공사기간 : 착공일로부터 25일

아스콘 조달구매

❍ 선정방법 : 조달청 3자단가 계약업체 중 서울북부권역 납품가능 품목

❍ 규격 및 수량 : #78표층용, 380Ton

❍ 검토내용

· 운반비 포함 단가 선택

· 공사완료 후 실투입 물량에 따른 검수(정산)

❍ 소요예산 : 30,000천원(78,125원/톤)

아스콘 철거 및 포장공사

❍ 계약방법 : 건설산업기본법에 의거 전문공사면허(포장공사업) 보유 업체

중 최저가 견적 제출업체와 수의계약

❍ 공사내용

· 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 : 3,172㎡

· 아스팔트 덱코팅 : 3,172㎡

· 차선도색(주차구획, 횡단보도, 방향안내 화살표 등)

· 카스토퍼 철거 및 설치(※카스토퍼 별도 구매)

❍ 소요예산 : 22,000천원

폐아스콘 처리용역

❍ 계약방법 : 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제21조에 의한 건설폐기물

중간처리업 또는 폐기물관리법 제46조에 의한 폐기물재활용

(건설폐기물) 신고 업체 중 최저가 견적 제출업체와 수의계약

❍ 용역내용 : 폐아스콘 수집·운반 및 처리

❍ 소요예산 : 8,500천원

주차관제설비 이설공사

❍ 계약방법 : 시설물유지보수 전문업체 중 최저가 견적 제출업체와 수의계약

❍ 설비내역 : 차량차단기, 발권기, 주차요금계산기, 관리부스 등

❍ 소요예산 : 7,000천원

추진일정

❍ 2014. 5. 28 ~ 5. 31 : 기본계획 수립

❍ 2014. 6.  1 ~ 6.  3 : 조달구매 및 공사 발주

❍ 2014. 6.  4 ~ 6. 30 : 공사시행

❍ 2014. 7.  1 ~       : 하자보수

Ⅲ		소 요 예 산

소요예산 : 67,500천원

예산과목 : 은평병원 원무과, 연구활성화 및 시설환경 개선으로

진료서비스 증진, 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리,

시설비 및 부대비, 시설비

계약방법 : 조달구매 및 수의계약

❍ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호에 의한 추정가격 1억원 이하인 전문공사

Ⅳ		기 대 효 과

병원청사 주차시설개선으로 쾌적한 병원이미지 향상

파손된 아스콘으로 인한 차량 및 인명 안전사고 예방