문서번호	산지방재과-5246
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	사면관리팀장	산지방재과장		푸른도시국장
배태인	김대성	정중곤		05/29 오해영
협 조
	주무관		조임남

- 사면 전수조사 및 산사태 피해저감시스템 구축 용역(3단계) -

준공기한 연기 검토 보고

2014. 5.

푸른도시국

(산지방재과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	서울연구원	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 사면 전수조사 및 산사태 피해저감시스템 구축 용역(3단계) -

준공기한 연기 검토 보고

“사면 전수조사 및 산사태 피해저감시스템 구축용역”과 관련하여 사면관리시스템 구축에 필요한 데이터베이스의 원활한 이관 및 산사태 위험지역에 대한 중장기 계획 수립 등에 추가 기간이 소요됨에 따른 절대공기 부족으로 준공기한을 연기하고자 함

		용역개요

○ 용 역 명 : 사면전수조사 및 산사태 피해저감시스템 구축 용역(3단계)

○ 과업기간 : 2013.08.21 ~ 2014.06.16

○ 과업대상 : 산지 및 구릉지 38개소, 도로사면 700개소, 주택사면 200개소

○ 계 약 액 : 1,593,600천원

○ 계 약 자 : 서울연구원

		준공기한 연기 필요성 검토

○ 연기 사유

- 금년 10월 완료 예정인 사면관리시스템 구축(1단계)에 필요한 데이터베이스의 원활한 이관을 위한 협조 체계 유지 및 산지사면 전수조사(1~3단계) 결과 산사태 위험지역에 대한 사방사업 완료 여부 등을 검토한 후 종합적인 중장기 계획 수립이 필요한 바, 이를 수행하기 위한 추가 기간이 소요됨에 따른 절대공기 부족으로 준공기한 연기 필요

○ 준공기한 연기 내역 : 80일 연장

구 분	용역기간	계약금액	비 고
당 초	´13.08.21 ~ ´14.06.16	1,593,600천원
변 경	´13.08.21 ~ ´14.09.04	변경 없음

○ 연기에 따른 귀책 소재 및 지체상금 부과

- 귀책소재 : 서울특별시

- 지체상금 : 미 부 과

		조치계획

○ 용역 준공기한 연기에 필요한 사유를 우리시 경리관 및 계약상대자에게 통보하여 용역 관리에 차질이 없도록 조치하고자 함.

붙  임 : 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.