문서번호	교통정보센터-7993
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도로정보팀장	교통정보센터장	교통운영관		도시교통본부장
박명수	최종선	이경순	서성만		05/30 김경호
협 조

「도시고속도로 교통관리시스템」

노후 도로전광표지(VMS) 성능개선 발주계획

2014.  5. 30.(금 )

도시교통본부

(교통정보센터)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「도시고속도로 교통관리시스템」

노후 도로전광표지(VMS) 성능개선 발주계획

2000년부터 단계적으로 구축하여 운영하고 있는 도시고속도로 교통관리시스템 중 내용연수를 경과한 장기간 사용으로 잦은 장애가 발생하고 시인성이 저하된 노후 도로전광표지의 성능을 개선하여 양질의 교통정보를 제공하고자 함.

Ⅰ		교통관리시스템 구축 현황

□ 설치구간 : 259km(도시고속도로 157 / 남산권․주요도로 102)

□ 시설내역 : 1,676식(VMS, VDS, CCTV, LCS 등)

구 분			연장 (km)	구축기간	사업비 (억원)	VDS			CCTV	VMS	RMS	LCS
						영상	루프	DSRC
계			259		1,038	797	301	55	153	306	31	33
도시 고속	1단계 (내부순환, 강변북로)		40.1	'00. 6~'02. 5	211	213	24		38	62	12
	2단계	1공구 (북부간선)	21.7	'01.11~'04.5	155	120	2		22	39
		2공구 (올림픽대로)	49.3	'03.10~'05.9	232	218	124		40	79		19
	3단계 (동부간선, 경부고속)		45.7	'05. 4~'07. 4	305	194	10		36	61	19	14
남산권 (남산터널, 소파․소월길)			10.6	'00. 7~'02. 5	31		141		9	13
도심권․주요도로 (서부간선, 강남대로 등)			91.6	'10. 7~'13. 8	104	52		55	8	52

VDS : 차량검지기 (Vehicle Detector System) VMS : 도로전광표지 (Variable Message Sign) CCTV : 폐쇄회로 TV (Closed-Circuit Television)	DSRC : 단거리 전용통신 (Dedicated Short Range Communications) LCS : 차로제어시스템 (Lane control system) RMS : 연결로 제어시스템 (Ramp Metering System)

Ⅱ		VMS 운영실태 및 문제점

□ 내용연수를 경과한 장기간 사용으로 시설 노후(총 306개소 중 133개소)

노 선 별	설치수량 (개소)	개선완료 (개소)	교체대상 (개소)	설치년도 (년)	내용연수 도래시기	경과년수 (년)
계	306	60	133
1단계 (내부순환, 강변북로)	62	37	25	2002	2010	4년
2-1단계 (북부간선, 강변잔여)	39	4	35	2004	2012	2년
2-2단계 (올림픽대로)	79	6	73	2005	2013	1년
3단계 (동부간선, 경부고속)	61			2007	2015
남산권 (소파․소월길)	13	13		2010	2018
도심권	25			2011	2019
주요도로	27			2013	2021

※ 내용연수 : 전광판 8년(물품관리법 제16조의2에 의한 조달청 고시)

□ 부품 내구성 저하(균열)로 인한 수분 침입으로 잦은 장애 발생

LED모듈 균열로 인한 수분 침입		수분침입 방지 커버	수분침입에 따른 누전으로 화재발생

Ⅲ		성능개선 대상 선정 및 개선방안

□ 대    상 : 올림픽대로(2-2단계) 7개소

① ML1040(한강→한강철교)	② ML1050(반포→동작)	③ ML1070(성수→동호)	④ ML1110(올림픽→잠실철교)
⑤ ML5050(성산→양화)	⑥ ML5080(반포→한남)	⑦ ML5130(올림픽→천호)	① 김포방향 ② 김포방향 ③ 김포방향 ④ 김포방향 ⑤ 하남방향 ⑥ 하남방향 ⑦ 하남방향

□ 선정기준

○ 노후도가 심하여 장애발생 빈도가 높은 올림픽대로(2-2단계) VMS 우선 선정

○ 올림픽대로상 노후 VMS 중 일일통행량이 많은 곳 우선 선정

□ 개선방안

연번	시 설 물	당 초	개 선
1	ML1040 - 김포방향 (한강 → 한강철교)	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 노들로, 올림픽대로, 강변 - 감시 : 모듈단위	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 서부간선 추가 검토 - 감시 : 도트단위
2	ML1050 - 김포방향 (반포 → 동작)	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 노들로, 올림픽, 강변 - 감시 : 모듈단위	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 동작대로 추가 검토 - 감시 : 도트단위
3	ML1110 - 김포방향 (올림픽 → 잠실철교)	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 올림픽대로, 강변북로, 경부고속 - 감시 : 모듈단위	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※600×600(32×32dot) - 정보 : 기존 유지 - 감시 : 도트단위

연번	시 설 물	당 초	개 선
4	ML5050 - 하남방향 (성산 → 양화)	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 노들로, 강변, 올림픽, 경부, 동부 - 감시 : 모듈단위	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 기존 유지 - 감시 : 도트단위
5	ML5080 - 하남방향 (반포 → 한남)	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 경부고속, 올림픽, 강변북로, 동부 - 감시 : 모듈단위	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 강남대로 추가 검토 - 감시 : 도트단위
6	ML5130 - 하남방향 (올림픽 → 천호)	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 올림픽대로, 외곽순환 - 감시 : 모듈단위	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 기존 유지 - 감시 : 도트단위
7	ML1070 - 김포방향 (성수 → 동호)	- 형식 : 문자식(3단15열, 3Color Lamp LED) ※ 600×600(32×32dot) - 정보 : 경부, 올림픽, 강변, 남산1호터널 - 감시 : 모듈단위	- 형식 : 도형식(15단21열, Full Color LED) ※ 240×240(16×16dot) - 정보 : 강남대로, 반포대로 추가 - 감시 : 도트단위

Ⅳ		사업 추진 계획

□ 사업기간 : 2014. 6. ~ 2014. 9.(4개월)

□ 소요예산 : 602백만원

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업자간 경쟁, 적격심사)

○ 교통정보센터 발주사업의 계약방법 검토보고(본부장방침, 교통정보센터-5135, ‘14.4.7.)

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제9조(계약의 방법)

-「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제6조(중소기업자간 경쟁제품의 지정), 제7조(경쟁제품의 계약방법)

- 중소기업청 고시 제2013-5호(중소기업자간 경쟁제품) - 교통전광판(55121903)

- 중소기업자간 경쟁제품 물품구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준

종합평점(100점) = 계약이행능력(30점) + 입찰가격(70점) + 신인도(+3 ~ -2점) = 100점

□ 입찰참가자격

○「지방자체단체를 당자사로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조(입찰의 참가자격), 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 요건을 갖춘 업체

○ 입찰공고일 기준「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조(직접생산의 확인 등)에 의한 직접생산증명서를 소지한 업체

○ 입찰공고일 기준「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사업 등록업체

□ 예산과목

부서)도시교통본부 교통정보센터, 정책)과학적인 교통정보서비스 구현, 단위)과학적인 교통운영체계 구축, 세부)도시고속도로 교통관리센터 운영 및 관리시스템 위탁관리, 통계목)시설비

Ⅴ		추진일정 및 행정사항

□ 추진일정

○ 2014. 5. : 발주방침 → 계약심사 → 입찰 및 계약 → 착수

○ 2013. 6.~ 9. : 물품제작 및 현장설치 → 납품검사

□ 행정사항

○ 물품제작설치 및 검사 시 위탁관리기관인 시설관리공단 협조 요청. 끝.