투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기요청 (송정,사근빗물펌프장 증설공사 및 폐기물처리용역)

1. 우리부에서 시행 중인 『송정,사근 빗물펌프장 증설공사(전체, 2차)』 및 『송정,사근 빗물펌프장 증설공사 건설폐기물처리용역(전체,1차)』의 준공기한을 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기   바랍니다.

가. 공 사 명 : 송정,사근 빗물펌프장 증설공사 (전체, 2차)

구 분	도 급 비	당 초	변 경	비 고
총 차	7,219,729,000원	'12. 12. 27∼ '14. 6. 19	'13. 3. 28∼ ‘14. 10. 31
2 차	4.630,781,500원	'13. 3. 28∼ '14. 6. 19	'13. 3. 28∼ ‘14. 10. 31	134일

나. 용 역 명 : 송정,사근빗물펌프장증설공사 건설폐기물 처리용역 (전체,1차)

구 분	용 역 비	당 초	변 경	비 고
총 차	196,370,900원	'13. 3. 15∼ '14. 6. 19	'13. 3. 15∼ ‘14. 10.31
1 차	138,069,330원	'13. 3. 15∼ '14. 6. 19	'13. 3. 15∼ ‘14. 10.31	134일

다. 도 급 자 : 경동산업(주)외 1개사  〔폐기물처리용역 계약 : ㈜벽성그린산업〕

라. 준공기한 연기〔시설공사 (전체, 2차분), 건설폐기물처리용역 (전체, 1차분)〕

- 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금부과여부 : 미 부과

- 연기사유 : 붙임참조

마. 예산과목 : 하천관리과, 치수및하천관리, 수방대책사업, 송정,사근빗물펌프장시설용량증대

따로붙임  1) 준공기한 연기검토보고서. 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 2부

3) 합의각서 2부 (별도송부). 끝

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임병길		방재시설과장	서관석		방재시설부장	06/02 박종웅
협조자	계약1팀장	김점선		계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-3984	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15	/
전화	3708-8762	/전송	3708-8756	/	bglim@seoul.go.kr	/	대시민공개