급수공사 준공 연기 보고

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
문현수	김태형	06/02 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-12679

2013년응봉동외8개동상수도공사(장기계속) 감독업무 수행중 급수공사 준공기간 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014. 06. 02.

###########################

공사현황

공사명 : 2013년응봉동외8개동상수도공사(장기계속)

도급자 : ############

공사현황

연번	접수번호	공사종류	위 치	수요가명	공사기간	비고
1	201405120018	신설-208	##############	###	2014.05.21 ~ 2014.06.02

연기요청사유

사유 :  수요가 원에 의한 연기(비계공 철거지연)

검토결과

상기와 같은 사유로 상수도 급수공사 준공기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	##############	###	2014.05.21 ~ 2014.06.02	2014.05.21. ~2014.06.12

귀책사유 : 동부수도사업소장

지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 공사연기 요청서 1부.(별도 첨부). 끝.