문서번호	급수운영과-8546
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
조봉구	이경재	06/02 우종근
협 조

급수공사 연기 보고(거여동 562-4)

명에 의거 마천동외 13개동 상수도공사 담당업무 수행중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 보고 요지 : 급수공사 준공기한 연기

2. 공사 현황

지시번호	공사위치	공사개요	기존공사기간	변경공사기간	연기사유
신29	거여동 562-4	구경 20㎜, 연장 2m	5.2 ~ 5.2	~ 2014.06.30	신축공사현장 지연

3. 지체상금 부과여부 : 급수공사 수요가 요청으로 인한 급수공사 연기건이므로 지체상금 미부과코자 함.

4. 조치내용

상기와 같이 수요가에서 급수공사일정 연기를 요청함에 따라 변경된 공사 기간을 (주)미래엔티씨 대표 박병훈에게 통보코자 합니다. 끝.