문서번호	도로보수과-2550
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
최영서	06/02 국중진

작업기한 연기 검토 보고

(굴착복구공사 1차 작업지시)

2014. 6.

성동도로사업소

(도로보수과)

·

작업기한 연기 검토보고(작업지시1차)

『2014년 포장도로굴착복구공사(연간단가)』시행 중 도로굴착

기관의 원인자가 굴착공사 지연으로 인해 작업지시(1차)한 굴착   복구 작업기한 연기 검토 보고

□ 공사개요

○ 공  사  명 : 2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가계약)

○ 공사기간 : 2014. 3. 28 ~ 2015. 2. 28

○ 계  약  일 : 2014. 3. 27

○ 도  급  자 : 한림토건  이현숙

○ 도 급 비 : 595,004,190원

□ 보고내용

○ 1차 작업지시분에 대하여 도로굴착기관(동부수도사업소)의 원인자가 굴착공사 지연으로 굴착복구 작업기한 연기요청(한림-0529호, 2014.5.29)

【1차 작업지시 현황】

- 작업지시일 : 2014. 4. 4

- 작업기간 : 당초 2014.4.4 ~ 5.30     변경 2014.4.4 ~ 6.30

- 연기사유 : 도로굴착기관(동부수도사업소)의 원인자 굴착공사 지연으로 1개소

미굴착

- 작업지시 내용 : 면목동 715 앞외 19개소(굴착복구 1.8a)

∙ 작업완료(임시포장복구) : 면목동 715 앞외 18개소(굴착복구 1.7a)

∙ 미 굴 착 : 면목동 147-7~151-2(9㎡)

∙ 일부구간 평삭후 덧씌우기 포장 필요

□ 조치의견

○ 위 내용과 같이 도로굴착기관의 원인자 굴착공사 지연으로 인해 작업기한 연기가 불가피한 실정임으로 작업기간을 변경승인하고자 함

첨 부 : 작업지시서(1차) 작업기한 연장건 공문 1부. 끝.