투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	한림토건 이현숙
(경유)
제목	1차 작업지시 작업기간 변경 승인(굴착복구공사)

귀 사의 발전을 기원하며 한림-0529(2014.5.29.)호와 관련하여 1차 작업작업지시 사항 중 작업기간 변경을 승인하오니 품질 및 안전에 철저를 기하여 시공하여 주시기 바랍니다.

구 분	당 초	변 경
작업기간	2014. 4. 4. ~ 5.30.	2014. 4. 4.~6.30.

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	최영서		도로보수과장	06/02 국중진
협조자
시행	도로보수과-2549	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 250	/
전화	2210-1533	/전송	2210-1549	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개