문서번호	기전설비2과-2326
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비2과장	시설부장
권혁제		김두석	06/02 차광재
협조	주무관		이창훈
	주무관		김영찬

-‘14년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

현장 실정보고 처리방안 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  5.   .

한강사업본부 시설부

[기전설비2과]

-‘14년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

현장 실정보고 처리방안 검토

수영장 운영부서와 합동점검 시 보완요구 사항에 대한 시설공단의 실정보고 내용 검토 및 처리계획을 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 :‘14년 한강공원 야외수영장 시설물 보수공사

공사내용 : 수조도장 27,300㎡, 타일설치 1,600㎡ 등

공사기간 : 2014. 4. 7. ～ 2014. 9. 30.

시 공 사 : 주식회사 승화프리텍

도 급 비 : 1,332백만원

공 정 률 : 87%

Ⅱ		추 진 경 위

2014. 05. 01 : 공사현장에 대한 발주 및 운영부서, 시설공단 합동점검

2014. 05. 08 : 점검결과 통보 및 검토 후 실정보고 제출 지시 (시설공단)

2014. 05. 27 : 공사 실정보고서 제출 (시설공단 ⇒ 본부)

Ⅲ		보고내용 검토

관련근거 : 시설관리공단 공사감독1처-4163호(2014.05.27.)

검토내용

① 수조외부 바닥콘크리트 파손 및 코팅제 탈락 (광나루, 잠실, 잠원, 망원수영장)

◦처리방안 : 파손부 제거 및 단면보수 후 코팅제 도포

▹ 콘크리트 단면제거(3cm)정리 ⇒ 표면강화제 ･ 프라이머 도포 ⇒ 폴리머몰탈 충진(3cm) ⇒ 코팅제 도포

◦정비물량 : A=53㎡, 폐기물 V=1.6㎥

◦발생폐기물은 폐기물처리용역에 반영하여 처리.

② 수조내부 및 테두리 코팅제 탈락 (뚝섬수영장, 난지물놀이장)

◦처리방안 : 탈락부 제거 및 표면보수 후 코팅제 도포

▹ 코팅제 제거(그라인딩) 및 정리 ⇒ 표면강화제 ･ 프라이머 도포 ⇒ 코팅제 도포

◦정비물량 : 102㎡(뚝섬 2㎡, 난지 100㎡)

③ 수영장내 카페 및 매점 건물하부 차폐 (뚝섬, 여의도수영장)

◦현황사진

뚝섬 카페테리아 하부	뚝섬 매점 하부	여의도 카페테리아 하부

◦처리방안 : 미관 및 환경개선을 위해 방부목으로 하부공간 차폐

▹ 차폐 후 하부공간 이용을 위한 출입문 설치 (뚝섬 1, 여의도 2)

◦차폐면적 : A=93㎡(뚝섬 30㎡, 여의도 63㎡)

④ 뚝섬수영장 수조내 월류부 트렌치 덮개석 파손

◦현황사진

트렌치 덮개석 파손	시공자재 ( 압출형 트렌치)	시범시공 (어린이풀)

◦처리방안 : 어리이풀 트랜치 덮개석을 압출형 트랜치로 시범시공

▹  시범시공 후 발생되는 덮개석은 파손부와 교체 및 보수자재로 재활용

◦시공물량 : 52m (규격 : 두께=23mm, 폭=200mm)

⑤ 기타사항

◦뚝    섬 : 목재데크 및 판석탈락, 메쉬휀스 보수

◦잠    실 : 수조내부 스테인레스 뚜껑 정비 및 그늘막 보수

◦여 의 도 : 탈의실 입구 조류진입 방지망(4개소) 설치

◦처리방안 : 계약내역에 반영된 작업인원(90인)으로 조치 후 정산처리

공사비 검토

□ 단가적용

▹ 신규공종인 차폐시설 및 트렌치 설치는 신규대가 작성후 낙찰율(86.76%) 적용

▹ 이외 공종은 기 계약단가 적용

□ 개략 공사비

구 분	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
수조 내･외부 보수	천원	-	10,552	10,552	제경비 46.09%적용 (정산보험료 제외)
건물하부 차폐시설		-	9,416	9,416
트렌치 뚜껑 설치		-	6,270	6,270
철거 및 고재처리		-	-166	-166
제 경 비		-	11,928	11,928
계		-	38,000	38,000

□ 예산조치

▹가용예산 현황 : 39,392천원

- 기 확보한 이설비 및 관급자재비 중 사용잔액 : 6,022천원

･ 1차 실정보고 승인(16,662천원) 및 메쉬휀스 추가구매(3,541천원) 후 미추산 금액임

- 계약내역 중 정산대상 보험료 : 33,370천원

･ 건강 , 연금, 노인요양, 퇴직공제 보험료 : 실공사 기간이 2개월로 대부분 정산대상임

▹가용예산 범위 내임으로 향후 설계변경시 반영.

Ⅳ		검토의견 및 조치 계획

검토의견

□ 계약내역에 미 포함된 상기 검토사항은 이용자 안전 및 미관개선을 위해

추가 보수가 필요하며,

□ 증가된 물량에 대한 단가적용은 적정한 것으로 판단됨

조치계획

□ 시설공단의 실정보고 건 승인 및 향후 설계변경 시 증가된 물량을 반영하여

정산처리토록 지시하고자 함.

첨 부 : 추가공사 개략공사비 산출 총괄내역서 1부.  끝.