문서번호	시설관리과-1542
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
유충현		김상언	06/02 차광재
협 조
	주무관			오상협

공사현장 상이 실정 검토보고

(‘14년 하천시설물 기반시설개선공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

한강사업본부

(시설관리과)

공사현장 실정 검토 보고

시행중인 “하천 기반시설개선공사” 구간중 미군부대에서 관리하는 취수장구간 제외 및  용산경찰서 교통개선요청 구간에 대한 해소방안과 시공물량 증․감 변경사항 등에 대해 현장조사 보고하여 조치코자 함

Ⅰ		공 사 개 요

1		공사현황

❍ 공 사 명 : 하천시설물 기반시설개선공사

❍ 사업규모 : 잠원공원 등 4개 안내센터내

- 보도설치 200m, 도로확장 폭 5.5 → 6.5m, 호안브럭설치 1,304㎡ 등

❍ 공사기간 : 2014. 4. 23. ~ 2014. 12. 31

❍ 사 업 비 : 707백만원(도급비 432, 관급비 158, 폐기물 등 117)

❍ 시 공 사 : ㈜한두건설엔지니어링 대표 정민호

2		공사구간

센터명	공사구간 선정내용	주요공사 개요
잠 원 ①	• 잠원수영장 진입보도 설치필요 - 신잠원나들목 및 주차장에서 수영장으로 진입구간보도 없이 차량과 보행자 혼재이용, 안전사고 발생우려	•수영장 진입보도설치 - 폭 1.5m, 연장 180m • 배수관 200m, 포장(Asp) 12.6a
뚝 섬 ②	• 잠실대교 하부 강변북로 제방보수 필요 - 잦은 침수지역으로 토사유실 방지 호안 설치필요	•호안브럭설치 : 195㎡ - 사면 13×15m(I블럭)
이 촌 ③~⑤	• 반포대교 북단하류 280m구간 산책로 노후 및 파손 - 산책로(Con’c)동결융해로 인해 파손 보행시 먼지발생	•콘크리트평삭 및 포장(Asp) - Asp 525㎡, 유색 725㎡
	• 반포대교 북단하류 한강호안 노후파손 및 유실 - 미 8군부대사용 한강내 취수장 설치구간	•호안블럭설치 500㎡ - 사면 10×50m(식생블럭)
	• 이촌 제2주차장에서 용산구 서빙고동 진·출입도로 협소 - 양방향 교행도로로 빈번한 차량사고 발생 (철도건널목까지)	•도로확장 및 옹벽설치 등 - 도로확장 5.5 → 6.5m
망 원 ⑥	• 한강변(수영장~안내센터앞)자전거도로에 설치된 노후난간에 높이가 낮아(0.7m) 안전사고 발생우려 - 안전사고 발생(충돌 등)시 추락으로 인명사고 위험	•노후난간 교체 : 850m - 침수시 뻘제거용이 난간

Ⅱ		현장조사 내용

1		변경 공사구간

① 잠원수영장 진입보도 설치공사

❍ 보도설치(1.8m)위해 수영장내 기존관목류 설치구간을 최대한 이용하고 사면쪽으로 수로관(0.3×0.3m)을 설치하여 최소 차량도로폭(6.0m)을 확보 시공중 지장시설물(하수,통신,전기 등)맨홀이설(3개소)이 필요

- 또한 기존 관목류를 공간협소로 제거하고자 하였으나, 지역특성(수영장)상 공간 확보후 관목류 설치가 필요함

④ 한강호안브럭 파손보수공사(이촌)

❍ 반포대교 북단하류 한강내 둔치에 설치된 취수장보호블럭이 노후 파손되어 본공사에 포함 보수예정이었으나, 취수장 사용관리가 용산구 미8군 시설물로 공사에 어려움이 있음

- 사용 관리자(미 8군)로 하여금 보수토록하고 본공사에서 제외될 수 있도록 검토필요

위 치 도(반포대교하류)	현 황 사 진(호안브럭 손상)

⑤ 도로확장공사(이촌 철도건널목)

❍ 자동차도로인 이촌 제2주차장~서빙고동앞(철도건널목)간은 일부구간(55m)협소로 양방향 교행에 어려움이 있어 확장(5.5m→6.5m)후 평삭하여 재포장으로 계획되었으나,

- 도로폭 확장에 따른 평삭은 제외후 재포장(t=5cm)이 가능하며, 기존 노후 손상된 경계브럭 및 난간설치구간은 추가 설치가 필요함

2		고질민원 구간

	〈관련근거〉
□ 용산경찰서 교통과–4721(‘14.5.16)교통안전시설 설치요청(이촌) ○ 원효대교~한강대교방면 강변북로 정체시 공원이용도로 사용 정체 ○ 응답소, 국민신문고 등에 접수되어 우회도로 폐쇄(끼어들기)요청

❍ 강변북로(원효대교~한강철교간)에서 공원내 주차장 진입도로를 강변북로 우회도로로 인식하는 차량(끼어들기)들로 인해 교통정체가 가중되고 있어 이를 해소해 달라는 용산경찰서 및 민원이 지속적으로 제기됨

- 조사결과 차량 진입후 강변북로 진입차도 폐쇄시 주차장 이용차량(버스)의 회전반경이 축소되어 일부 녹지부분을 축소 공간 확보후 폐쇄 필요

위치도(한강철교~한강대교간)	현황사진		개선 (후)

Ⅲ		조치의견

❍ 공사구간 ① 잠실수영장  진입보도설치공사, ⑤ 도로확장공사(철도건널목구간)에서 발생된 추가 시공물량(지장 맨홀이설, 관목이식, 수로관 선형변경 등)에 대해서는 시공토록 조치하고,

❍ 취수장 호안블럭설치공사는 관리자(미 8군사령부)로 하여금 보수 조치될수 있도록 통보하여 금회 시공물량에서 제외 하고자 하며,

❍ 민원발생구간(진입로 폐쇄)은 공원내 진입로를 통해 직접 강변북로로 끼어들지 못하도록 대형차량 최소 회전반경 확보후 폐쇄(방호첵)

- 공원 4주차장에서 버스 등 대형차량이 강변북로로 진출할 수 있도록 협소한 매표소앞 주변도로 확장(녹지 일부 310㎡)설치

❍ 구간별 주요공종 증․감내역

공 사 구 간	증 ‧ 감 물량	개략공사비
① 잠원수영장 진입보도 설치공사	• 관목류 이설(쥐똥나무) : 720주 • 지장맨홀이설 : 3개소 • 집수정설치 : 2개소 • 굽은수로관 선형조정 설치 : 18m	증) 23백만원
④ 한강호안브럭파손 보수공사(취수장 등)	• 호안브럭철거 및 설치 : 1,109㎡ • 앙카 및 신구접착제 : 1식 • 초륙화 식재 : 1,502주	감) 39백만원
⑤ 도로확장공사 (철도건널목)	• 아스팔트 평삭 : 560㎡(제외) • 아스팔트 포장 : 300㎡(증) • 경계석설치 : 137m(증)	증) 14백만원
강변북로 우회도로 폐쇄 공사(버스회전반경 확보)	• 조경석헐기 및 쌓기 : 27㎡ • 아스팔트 포장 : 820㎡ • 경계석설치 : 120m • 침수방지 침사지설치 : 1개소	증) 37백만원

Ⅳ		행정사항

❍ 추가공사 및 물량 증․감에 대해서는 시공사로 하여금 선시공토록 작업지시하고 추가 소요되는 공사비(약 40백만원)는 이설비 및 낙찰차액을 사용 향후 설계변경시 반영 조치코자 함

첨 부 : 1) 개략공사 변경내역 1부.

2) 강변북로 주차장 진입도로 개선후 현황 1부.  끝.