문서번호	물재생시설과-7012
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		물재생시설팀장	물재생시설과장
김병오		천정남	06/02 김병위
협조

“난지물재생센터 환경개선사업 기본설계 용역 ”

고양시 의견 검토보고

2014. 6.

도시안전실

(물재생시설과)

“난지물재생센터 환경개선사업 기본설계 용역 ”

고양시 의견 검토보고

난지물재생센터 환경개선사업 기본설계(안) 공람공고 시 고양시에서 제출된 의견에 대한 검토결과를 보고드림

1		추진근거

❍ 서울시 – 고양시 상생발전을 위한 공동 합의문 체결(2012.5.2)

2		추진경위

❍ 2011.11. ~ 2012.12. : 타당성조사 및 기본계획용역

❍ 2013. 2. 4. : 환경개선사업 추진계획수립(2부시장 방침 제37호)

❍ 2013. 3.13. : 기본설계용역 발주

❍ 2013. 5.31. : 기본설계용역 계약(2013.6.4. 착수)

❍ 2013. 6 ~ 8월 : 현장조사 및 관련자료 검토

❍ 2013. 9.11. : 1차 자문회의 개최

❍ 2013.10.31. : 2차 자문회의 개최

❍ 2013.12.13. : 주민협의체 용역설명회 개최(1차)

❍ 2014. 2.20. : 3차 자문회의 개최

❍ 2014. 3. 6. : 주민협의체 용역설명회 개최(2차)

❍ 2014. 5. 8. ~ 2014. 5.21  : 기본설계(안) 공람공고(14일간)

3		고양시 의견 및 검토결과

고양시 의견	검 토 결 과		비 고
① 상기 지역의 체육시설 및 공원 조성 지역 내에 건설 예정인 힐링텃밭(8)과 힐링가든(9)의 규모를 축소하고 그 대신 시민들의 여가 선용을 위한 야영장 조성	힐링텃밭과 가든 주변에는 기피시설인 분뇨처리 및 음식물처리시설이 인접하여 악취 및 미관 불량이 예상되어 연못과 수림대가 울창한 culture zone 남측에 야영장을 16면 확보하였으며, 야영장 부대시설(화장실, 세면장, 그늘막)도 확충하였음
	culture zone	공간계획
② 상기 부지는 도시계획시설(하수도)임으로「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조에 따라 실시계획인가를 받아 사업을 시행할 것.(단 하수도의 결정 구조 및 설치에 관하여는「하수도법」에 적합하여야 함)	현 과업은 기본설계 단계로 실시설계 및 추가 주민협의 시 계획안 변경의 여지가 있어 실시계획인가는 실시설계 단계에서 반영토록 하고자 함
③ 경기도 지역정책과-6084(2014. 5.13)호와 관련, 개발제한구역내 도시계획시설 및 대규모시설 설치계획 수립시 개발제한구역 관리계획 입안권자(도지사) 사전협의 대상 - 협의시기 : 사업타당성 검토 등 사업계획 구상단계 - 보고형식 : 기본계획 수준으로 제출(필요시 현황판 추가)3단계로 구분하는 공사의 예정공정표를 작성하여 시공의 연속성을 확보할 수 있도록 검토	건설기술심의(설계심의)시 지적사항을 반영한 종합계획을 경기도(고양시)와 협의 진행토록 하고자 함
④ 사업 시행 전에 GB관리계획(변경) 득 할 것	건설기술심의(설계심의)시 지적사항을 반영한 종합계획을 경기도(고양시)와 협의 진행토록 하고자 함

4		조치의견

❍ 야영장 조성 요청지역은 기피시설(분뇨 및 음식물처리시설)이 인접하고 있어 악취 및 미관불량이 예상되어 기 주민협의체 건의사항을 수용하여 culture zone 남측에 16면을 반영한 사항으로서 요청지역내 야영장 설치는 제외하고자 함

❍ 실시계획인가에 대해서는 향후 실시설계 단계에서 추진하고자 함

❍ 개발제한구역내 도시계획시설 및 대규모 시설 설치계획 수립과 GB관리계획(변경) 관련사항은 사업 추진부서에서 고양시와 협의하여 추진토록 하고자 함. 끝.