문서번호	시설관리과-14559
결재일자	2014.6.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이생기		최명익	06/02 나태산
협조

현장 실정보고에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

중부수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고에 따른 검토 보고

명에 의거 『############################』 업무 수행중 시설관리공단으로부터 실정보고를 받고 검토한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

□ 현  황

#####################################

나. 공사기간 : 2014-4.9 ~ 2014.10.5

#####################

########################

############################

###############################

□ 보고내용

가. 위 공사 현장은 야간 도심지내 교통량이 많은 구간으로(원남사거리~성균         관대입구)시민들에게 공사현장을 사전에 알릴수 있는 교통안전 시설물 반         영이 필요하고, 서울시 교통소통대책 심의 및 도심지내 현장여건과 당초

설계시 반영된 교통안전 시설물 항목이 상이하여 교통 안내를 위한 교통         안전 시설물 추가 설치하여 안전사고를 사전에 예방하고자 하는 시설관리         공단으로부터 실정보고가 있음.

□ 처리의견

가. 위 와 같이 서울시 교통소통대책 및 도심지내 현장여건을 고려하여 교통          안전 시설물추가 설치요청 현장실정보고에 대해 추가설치 토록 승인하고,

나. 시공후 물량변경은 설계변경시 반영토록 시설관리공단에 회신하여 현장

안전관리에 만전을 기 하고자 함.

별첨 : 현장실정보고서 1부.  끝.