투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	928 역무종합관리실 구조물 설치 긴급 요구 처리 지시

1.문서번호 : SMIH-14-27770

2.작성일자 : 2014-06-02 18:05:28

3.제    목 : 928 역무종합관리실 구조물 설치 긴급 요구 처리 지시

4.내    용 : 1). 도시철도설비부 설비계획과 긴급 요청 사항입니다.

2). 지하철9호선 2단계 916공구 건설공사 928정거장 #1 출입구 부분에 역무종합관리실에 종합제어반 시설(기계, 전기, 통신 등)을 설치코자 하나, #1 출입구 상부가 완료되지 않아 우기시 설비 및 건축 시설 설치 관리에 어려움이 있어

3). 역무종합관리실 연동시운전(종합제어반)이 2014.06.20.～06.30로 계획되어 있고, 우기시 건축 및 설비 시설이 우수로부터 안전하게 설치되어 연동시운전이 될  수 있도록 928정거장 #1 출입구 상부 구조물을 조속히 마무리 설치하여 달라는 긴급 요청 사항을 통보하니

4). 책임감리원은 도시철도설비부 설비계획과 긴급 요청과 관련 928 정거장 #1 출입구 상부 구조물 마무리에 대하여 관계분야 감리원과 협의하고 처리안을 마련하여 2014.06.09.까지 제출하시기 바랍니다.

붙임 : 도시철도설비부 설비계획과 긴급 요청 사항 1 부.  끝.

★주무관							성원배			토목2과장					06/02 권일순
협조자
시행			도시철도토목부-6034									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85) 서울시청 남산별관 4층															/
전화		02-772-7222						/전송			02-772-7307					/	parandal@seoul.go.kr												/	대시민공개