문서번호	정수과-3170
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
안영환		현인식	06/02 정남기
협조	행정관리과장		김용근
	주무관		김근태

『사업장폐기물 처리용역 』 변경계약 계획

2014. 6

영등포아리수정수센터[정수과]

사업장폐기물처리용역 변경계약 계획

우리정수센터 『사업장폐기물 처리용역(단가계약)』과 관련하여 계약기간 종료 및  물량변동에 따른 변경계약을 추진하여 계약관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 용역계약 현황

○ 계약명 : 영등포아리수정수센터사업장폐기물(무기성정수오니) 처리용역 단가계약(장기계속계약)

○ 용역기간 : 2012. 6. 1 ~ 2014. 5. 31

○ 계약상대 : 처리자[진명기업(대표 최환준)], 운반자[임송농산(대표 양기훈)]

○ 계약단가 : 금35,200원/톤(처리22,000원/톤, 운반13,200원/톤)

○ 계약금액(3차수) : 금183,075,200원(총 부기금액 : 금880,000,000원)

구 분	합계	2012년 (6.1~12.31)	2013년 (1.1~12.31)	2014년 (1.1~5.31)	비고
처리물량	25,000톤	7,182톤	12,617톤	5,201톤
금 액(원)	880,000,000원	252,806,400원	444,118,400원	183,075,200원

□ 변경계약 사항

○ 2014년 사업장폐기물 처리용역 계약종료

- 계약기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 5. 31

○ 변경계약 내용

- 3차수 계약물량 및 계약금액 조정

- 변경물량 : 3,983톤(감1,218톤)

- 변경금액 : 금140,201,600원(감42,873,600원)

○ 세부 변경내역

- 3차수 계약 물량조정                                            (단위:톤)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총물량		25,000	23,782	감1,218
차수별	1차(2012)	7,182	7,1821	기성
	2차(2013)	12,617	12,617	기성
	3차(2014)	5,201	3,983	감1,218

- 물량조정에 따른 계약금액 조정                                  (단위:원)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총용역비		880,000,000	837,126,400	감42,873,600
차수별	1차(2012)	252,806,400	252,806,400	기성
	2차(2013)	444,118,400	444,118,400	기성
	3차(2014)	183,075,200	140,201,600	감42,873,600

□ 향후 일정

○ 2014. 6. 2 : 변경계약 시행

○ 2014. 6. 3 : 변경계약 의뢰(재무과)

○ 2014. 6. 10 : 변경계약 완료

○ 2014. 6. 11 : 준공검사

붙 임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경 내역서 2부.  끝.