문서번호	총무과-14931
결재일자	2014.6.3.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	06/03 오형철
협조

임차청사 사무실 배치 전기공사 계획 보고

2014. 6.

총무과

임차청사 사무실 배치 전기공사 계획 보고

임차청사 재배치 계획에 따른 전기공사를 다음과 같이 시행하여 쾌적하고 안전한 사무환경 조성에 기여 하고자 합니다.

1		추 진 근 거

○ 임차 청사 등 청사 재배치 계획:총무과-11471(‘14.4.25)

○ 임차청사 등 이전 관련 직원 의견 수렴결과에 따른 부서 재배치:       총무과-13712(‘14.5.21)

2		공 사 내 용

□ 공사기간 : ‘14. 6. 2 ~ 7.13

○ 공사업체 : 연간단가계약업체{㈜거산 대표 엄재룡}

□ 주요내용

○ 전등공사 추진방향

- 칸막이 구획 공간에 위치한 등기구 이설

- 조명 사각지대는 조도 개선을 위해 노출 전등(T-5램프)

추가 설치 필요(현재 조도 약250 ~ 700룩스)

- 칸막이 공간은 조명회로 분리 후 스위치 설치

‣공용회의실, 탕비실, 실·국장실, TPS실, 창고, 교육장 등

○ 전열공사 추진방향

- 바닥 시스템 박스에서 인출하여 사무기기 전기공급

‣팀별 전원회로 분배(바닥배선 철거 및 설치)

‣사무기기 전원용 멀티탭 설치

- 전력간선 추가 설치

‣공용회의실 냉난방기, TPS실(통신장비) 냉방기

※ 전력요금 정산을 위한 냉난방기 전용 전기계량기 별도 설치

‣탕비실 및 전원 별도 설치

○ 임차청사 전등 및 전열

- 조명 현황

구 분	합계	3층	4층	7층	8층	9층	비고
매입형광등 (32W×2)	703등	168등	92등	168등	107등	168등	사무죤
매입형광등 (32W×2)	50등	12등	8등	12등	6등	12등	〃
다운라이트 (13W×2)	170등	34등	34등	34등	34등	34등	화장실

전등	바닥전열	스위치

- 분전반 : 각층에 3면(개소) 설치

‣냉난방기 실외기 : 3층 테라스 및 16층 옥상층에 설치

3		세부 공사계획

구 분		공 사 내 용	비 고
3층	조명공사	▸ 칸막이부분 회로분리 : 10개소 - 전선(HFIX 2.5mm) 및 전선관 설치 - 등기구 철거 설치, 스위치 설치 ▸ 일자리플러스센터 조도개선 - 노출 등기구(T-5램프) 및 다운라이트 설치 ▸ 유도등 설치 : 4개소
	전열공사	▸ 멀티탭 콘센트 설치 : 184개소 ▸ 전력간선 설치(F-CV) - 일리자플러스센터 교육장 빔프로젝터 - 공용탕비실 2개소 - TPS실(10kW) 냉방기
4층	조명공사	▸ 칸막이부분 회로분리 : 11개소 - 전선(HFIX 2.5mm) 및 전선관 설치 - 등기구 철거 설치, 스위치 설치 ▸ 휴게실과 회의실공간 복도 조명 추가 - 노출 등기구(T-5램프) 10등 ▸ 유도등 설치 : 6개소
	전열공사	▸ 멀티탭 콘센트 설치 : 37개소 ▸ 전력간선 설치(F-CV) - 남·여직원휴게실, 공용회의실 냉난방기 전원 - 남·여직원휴게실 바닥 전원 - TPS실 냉방기 및 공용탕비실(1개소)
7층	조명공사	▸ 멀티탭 콘센트 설치 : 114개소 ▸ 칸막이부분 회로분리 : 10개소 - 전선(HFIX 2.5mm) 및 전선관 설치 - 등기구 철거 설치, 스위치 설치 ▸ 유도등 설치 : 3개소
	전열공사	▸ 전력간선 설치(F-CV) - 공용회의실 냉난방기 전원 - TPS실 냉방기 및 공용탕비실(2개소) 전원

구 분		공 사 내 용	비 고
8층	조명공사	▸ 칸막이부분 회로분리 : 8개소 - 전선(HFIX 2.5mm) 및 전선관 설치 - 등기구 철거 설치, 스위치 설치 ▸ 유도등 설치 : 2개소
	전열공사	▸ 멀티탭 콘센트 설치 : 69개소 ▸ 전력간선 설치(F-CV) - 공용회의실 냉난방기 전원 - TPS실 냉방기 및 공용탕비실(2개소) 전원
9층	조명공사	▸ 칸막이부분 회로분리 : 9개소 - 전선(HFIX 2.5mm) 및 전선관 설치 - 등기구 철거 설치, 스위치 설치 ▸ 유도등 설치 : 2개소
	전열공사	▸ 멀티탭 콘센트 설치 : 62개소 ▸ 전력간선 설치(F-CV) - 공용회의실 냉난방기 전원 - TPS실 냉방기 및 공용탕비실(2개소) 전원

○ 소요예산 : 약 40,000천원

- 조명공사 : 25,000천원

- 전열공사 : 15,000천원

□ 자체인력 시공으로 예산 절감

○ 공사내용

- 멀티탭 콘센트 설치 : 약 480개(15개부서 329명)

- 팀별 회로 분리에 따른 바닥 시스템박스 배선 철거 및 설치

○ 공사비(인건비) : 약 7,470천원

- 멀티탭 설치 -------    약480개 × 6,500원 = 3,120천원

- 전선설치 ---------- 약 1,500m × 1,700원 = 2,550천원

- 몰드 설치 -------------- 약600 × 3,000원 = 1,800천원

※ 자재구매 : 전선, 콘센트 등 약 5,000천원

4		추 진 일 정

○ 6. 3(화)~6. 7(토) : 현장 조사

○ 6. 9(월)~6.12(목) : 4, 9층 전기공사

○ 6.23(월)~6.26(수) : 3, 7, 8층 전기공사

□ 재배치 전등 도면 1부. 끝.