문서번호	급수운영과-13225
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강서수도사업소장
박용석		조면행	06/03 이상래
협조
	급수설비팀장		유인행

설계변경(2차)계획보고

(2013년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역)

2014.06

설계변경 계획보고

〔2013년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역-2차(최종)〕

2013년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역과 관련하여 각 공사별 물량변동에 따른 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 용역현황

가. 용 역 명 : 2013년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역(장기계속)

(단위공사,도로복구,시설물)

나. 용역기간 : 2013년 3월 14일 ~ 2014년 6월 30일

다. 용 역 비 : 187,642,990원

라. 계약상대자 : 금강도시환경(주)  대표 이상훈

마. 감독부서 : 서울특별시시설관리공단 상수도공사관리처 서홍석

2. 설계변경 내용

가. 설계변경 사유

- 화곡1동 366-1 ~ 336-15외3개소 세척갱생관정비공사외 11개 현장의 폐아스콘,폐콘크리트 및 폐토석 발생물량 증․감에 따른 설계변경(최종)

공 종	단위	당 초	변 경	증,감	비고
폐기물운반	㎥	3,359	3,383	증) 24
폐기물처리	ton	7,358	7,320	감) 38

나. 폐기물처리 용역비 증․감 현황

- 당초 : 187,642천원 ▶ 변경 : 187,586천원(감 56천원)

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증, 감
총용역비	187,642,990	187,586,000	감) 56,990
1차분	131,761,000	131,761,000	-
2차분	55,881,990	55,825,000	감) 56,990

3. 조치계획

가. 상기 설계변경 건에 대하여 『2013년 상수도사업 설계심사 추진계획(재무회계과-563,‘13.1.15)호』에 의거, 우리사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 타당성 여부 검토 후 심의 결과에 따라 조치코자 합니다.

첨부 : 1. 시설관리공단 설계변경 보고서 1부

2. 변경 내역서 1부. 끝.