문서번호	전시과-2609
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	전시과장	학예연구부장		서울역사박물관장
김양균	정명아	박현욱		06/03 강홍빈
협 조	경영지원부장		김소영
	총무과장		연규승
	시설과장		나용제
	보존과학과장		양필승
	유물관리과장		허대영
	한양도성연구소장		박상빈

박물관기획전'서소문 별곡' 전시 계획

2014.   5.    .

서 울 역 사 박 물 관

(전 시 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	민간단체
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	전시자문위원	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(	천주교 서울대교구	)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 ■ 기자설명회 ■ 현장설명회 ■ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

박물관 기획전

'서소문 별곡' 전시 계획

교황 프란치스코 방한을 기념하여 세계적인 천주교 박해의 현장이자 조선시대 칠패시장이 들어섰던 서소문밖의 역사와 함께 천주교 전래의 역사를 전시함으로써 근대사적 맥락에서 천주교의 역할을 재조명하고, 역사적 현장으로서 서소문의 위상을 자리매김하고자 함

Ⅰ		전시개요

일    시 : 2014. 8. 8(금) ~ 2014. 10. 31(금)(85일간)

전시개막 : 2014. 8. 7(목) 15:00

전시장소 : 기획전시실(A) - 864㎡(262평)

공동주최 : 천주교 서울대교구(교구장 : 염수정 추기경)

소요예산 : 360,000천원

협력기관

― 한국교회사연구소, 절두산순교성지

― 로마교황청 민속박물관, 인류복음화성고문서고, 파리외방전교회

전시내용

― 서소문 지역의 역사지리와 천주교 순교성지 조명

― 조선 천주교 전래, 박해와 순교의 역사, 그리고 한국사적 의의

Ⅱ		추진방향

천주교계와의 전시기획위원회 및 전시 개막․홍보팀 구성으로 전시협력 체계 강화

서소문 지역의 역사지리 관련 영상, 모형, 유물을 통해 입체적인 전시기획 및 콘텐츠 구성

로마교황청 및 서울대교구 산하 기관의 소장품을 대여 전시함으로써 서소문을 중심으로 생생한 한국 천주교회사 구현

Ⅲ		세부추진계획

전 시 구 성	주요 전시물
【첫째마당】 서소문밖으로의 역사여행
현재의 서소문에서 18세기의 서소문으로의 시간여행	○‘역사속으로’영상
【둘째마당】 서소문, 1780
1막. 18세기 후반 서울과 서소문(소의문) 2막. 한양의 서남 인후부, 서소문밖 3막. 칠패시장과 서소문 취락 4막. 조선의 공식 사형장, 서소문밖	○ 조선시대 서소문밖 모형 ○ 한경지략 ○ 목민심서 등
【셋째마당】 조선과 천주교의 만남 – 수용에서 갈등까지
1막. 근대의 태동, ‘꿈틀거리는’ 18세기 조선 2막. 조선 지식인, 서학을 통해 세계와 만나다 3막. 세계 유일의 자생적 신앙공동체, 조선 천주교회의 탄생 4막. 초기 교회의 활동과 시련, 가성직제도의 운영 5막. 조상제사 금지, ‘부모냐 천주냐’ 갈림길에 선 조선 지식인 6막. 최초의 신부, 주문모의 입국과 교세의 확산	○ 구베아 주교 편지 ○ 곤여전도 ○ 천주실의 ○ 정약용 십자가 등
【넷째마당】 예고된 혼돈의 역사 : 박해와 순교, 1801∼1874년
1막. 엇갈린 동행의 시작 : 신유박해, 1801년 2막. 숨은 신자들과 비밀리에 북경을 오가는 밀사들 : 조선대목구 설정, 1831년 3막. 또다시 불어닥친 박해의 회오리 : 기해박해, 1839년 4막. 아! 최초의 한국인 사제(수선탁덕⋅修先鐸德) 김대건 : 병오박해, 1846년 5막. 땀의 증거자 최양업 신부와 프랑스 선교사들의 활동 6막. 엇갈린 동행은 전국을 휩쓴 불길이 되다 : 병인대박해, 1866∼1874년	○ 황사영 백서 ○ 김대건 순교자 보고서 ○ 주교요지 ○ 상제상서 ○ 사학징의 ○ 조선대목구 설정 소칙서
【다섯째마당】 신앙의 자유를 얻다
1막. 개항, 세계를 향해 문을 열다 2막. 조선, 가톨릭신앙을 받아들이다 3막. 신앙의 터전에서 피어나는 천주교회 4막. 사회로 향한 천주교 : 한국 근대사회 속 천주교의 역할 5막. 민덕효의 42년간의 기록, 선교사의 눈으로 본 한국 근현대사 6막. 개항 이후 근대화 모습	○ 뮈텔주교 문서 ○ 약현성당 종 ○ 한불조약 문서 ○ 성심수녀회 사제복
【여섯째마당】 시복시성과 순교자 현양
1막. 시복시성의 추진과정과 절차 2막. 순교 성인들 3막. 순교의 현재적 의미와 시복시성의 의미	○ 시복시성관련 교령 ○ 김수환추기경 글 ○ 시복시성관련 성화
【일곱째마당】 다시 살아나는 서소문
1막. 사라진 서소문과 순교성지 2막. 서소문성지 복원사업	○ 시구개정 사업계획 ○ 서소문 근린공원 평면도

전시구성안

도록 제작

제작개요

- 규   격 : 국․영문 국배판(가로 220mm, 세로 290mm)

- 면   수 : 250면 내외

- 발행부수 : 1,000부

배포계획

- 무상배포 700부

(기본납부 150, 유관기관 200, 홍보용 100, 대외교류 220, 보관 30)

- 유상판매 300부(15,000원)

전시 홍보

천주교 서울대교구와의 홍보 협력체계 구축

전시홍보물 : 포스터 대․소(각 1,000), 리플렛(50,000), 보도자료, 대형현수막, 가로등 배너(200조, 광화문광장․새문안로 등)

전시 개막식

일  시 : 2014. 8. 7(목) 오후 3시(예정), 박물관 기획전시실 로비

참  석 : 천주교 서울대교구장, 상트 오틸리엔수도원장, 왜관수도원장, 교황청 민속박물관장, 국내박물관계, 문화계 인사 등

※ 동소문 별곡(가칭)전과 공동 진행

추진 일정

2014. 3. ~ 5.	전시기획 및 대여유물 협의
2014. 4.15	‘서소문별곡’전 공동주최 MOU 체결
2014. 5.26 ～ 6.20	전시설계 업체 선정 및 설계 진행
2014. 5.30 ～ 8. 5	도록 발주 및 제작 진행
2014. 7. 2	전시공사업체 선정
2014. 7. 7 ~ 8. 1	전시공사
2014. 7.14 ～ 25	전시 홍보물 제작
2014. 7.21 ～ 31	해외 및 국내 대여유물 운송
2014. 7.23	포스터, 초청장 등 홍보물 발송
2014. 7.31~8.6	보도자료 배포, 홍보, Preview
2014. 8. 7	개막식 개최
2014.10.31	전시폐막
2014.11. 1 ~ 10	전시철거 및 대여유물 반납

Ⅳ		예산집행계획

총 예산 : 360,000천원

구 분	수 량	예 산 액 (단위 : 천원)	비 고
전시설계	1식	16,000	시설비
전시시설공사 및 철거	1식	130,000	행사관련시설비
그래픽디자인	1식	22,000	행사관련시설비
모형제작	1식	30,000	사무관리비
영상물 제작	1식	30,000	사무관리비
도록제작	1식	22,000	사무관리비
전시홍보물 제작	1식	25,000	사무관리비
원고료 및 번역료	1식	10,000	사무관리비
유물운송 및 호송관 통역	1식	45,000	사무관리비
홍보물 및 도록발송	1식	3,000	공공운영비
국외출장	2회	8,000	국외업무여비
외빈초청	1회(2인)	8,000	외빈초청여비
개막식 행사	1식	6,000	행사운영비
기타(자문회의비, 전시자료 구입 등)	1식	5,000	사무관리비
총 계		360,000

예산과목

- 박물관 기획전, 사무관리비·시설비·행사관련시설비·공공운영비·국외업무여비·외빈초청여비·행사운영비(338,000천원)

- 반세기 종합전, 행사관련시설비(22,000천원)

예산집행

- 전자공개입찰 : 전시시설공사, 유물운송

- 소액수의계약 : 전시설계, 도록제작, 그래픽제작, 모형제작, 영상제작

※ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조1항5호(대통령령 제22638호

;2011.01.26.) 및 지방자치단체수의계약운영요령(행정안전부예규 제331호 2010.10.26.)

- 기타 운영비 : 500만원 이하 일상경비로 교부받아 신용카드 결재, 지로입금, 계좌입금

Ⅴ		부서별 협조사항

부 서 명	협 조 사 항
총 무 과	· 예산 및 행정지원, 공무국외여행 관련 협조, 개막식 의전 준비
시 설 과	· 개막식 및 전시실 영상 촬영, 전시실 전기 및 조명 지원, 개막식 음악 및 마이크 설치, 주요참석인사 무료주차, 전시실 안전유지, 전시실 청소 등 청결 유지
전 시 과	· 전시 지원
유물관리과	· 대여유물 수장고 전실 보관 협조
보존과학과	· 전시대상유물 보존처리 및 상태점검, 전시실 온습도 유지 및 전시환경 점검
교육대외협력과	· 보도자료 배포, 전시홍보 지원, 개막행사 의전 지원 등

Ⅵ		성과지표

공통지표    2. 조직 및 인력운영의 합리성·적정성

6. 사업운영의 적정성

고유지표   13. 관람환경의 적정성

19. 박물관전시회 운영 및 기획전시