다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	가로변정류소 승차대설치공사 정류소 지연현장 시정조치

1. 귀 조합의 노고에 감사드리며, 현재 추진중인 가로변정류소 개선사업관련입니다.

2. 송파구관내 가든파이브공구상가(24-477, 24-4788),장지역가든파이브(24-475,24-476) 승차대 설치공사를 함에 있어 보도굴착(2014.3.27.)후 2개월이 지난 아직까지 공사가 완료되지 않고 있어 시민불편 항의 및 안전우려 민원이 빗발치고 있습니다.

3.시민안전을 위해 빠른시일내(3~7일) 공사를 완료하여 주시기 바라며, 부득이 위 기간내 공사완료가 곤란할 경우 즉시 원상보구조치 하시고, 향후 공사를 재시행하시기 바랍니다.

4.관할구청 보도담당부서에는 보도점용허가 기간의 연장유무, 정당한 사유 여부, 적법성 등을 면밀히 검토하여 엄중히 처리하여 주시기 바랍니다.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울시버스운송사업조합 이사장 귀하,송파구청장(도로과장)
주무관	손창익		가로변정류소개선팀장	김송		버스정책과장	06/03 신종우
협조자
시행	버스정책과-10505	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 별관 1동 7층	/
전화	2133-2292	/전송	2133-1049	/		/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다