문서번호	물관리정책과-8509
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	물재이용관리팀장	물관리정책과장
이덕노	이웅희	06/03 배광환

자치구 시비 보조사업 위치변경 검토보고

2014. 6.

도시안전실

(물관리정책과)

자치구 시비 보조사업 위치변경 검토보고

종로구 빗물관리시설(빗물유입화단) 설치 시비보조 지원사업에 대한 위치변경 요청사항을 검토하고 조치계획을 보고드림

사 업 개 요

□ 사업명 : 빗물유입화단 조성

□ 기  간 : 2014. 6 ~ 10월

□ 규  모 : 빗물유입화단 1개소 50㎡

□ 사업비 : 25백만원(시비 12.5, 구비 12.5)

※ 자치구 시비보조사업 지원대상 확정통보 : 2014. 4.10(물관리정책과)

사업 계획 변경 (요청)

□ 요청 기관 : 종로구청

□ 대상지(위치) 변경

당 초	변 경
종로구 창덕궁길 2-108(서울중앙고 주변)	종로구 삼일대로 464(교동초교 주변)

<당초> 위치도 및 현황사진			<변경> 위치도 및 현황사진

□ 변경 사유

- 사업대상지 일부 구간에 사유지가 포함되어 사후관리(민원) 곤란

※ 변경요청 : 종로구 안전치수과-8144(2014.06.03)

조 치 의 견

□ 빗물 침투시설 설치 공간으로 적정 ⇒ 위치변경 승인 조치

- 빗물 침투기능 및 초기 우수 배출량 저감효과 유도. 끝.