문서번호	토목부-10708
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	터널건설과장	토목부장	시설국장
손준호	명경출	노우성	06/03 이광세
협 조
	주무관			이석우

지장물 간섭에 따른 시점부 우측옹벽 변경 검토보고

(응봉교확장 및 성능개선 공사)

2014. 06

도시기반시설본부

(토  목  부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『응봉교 확장 및 성능개선공사』

지장물 간섭에 따른 시점부 우측옹벽 변경 검토보고

시점부 우측(성수대교방향) 옹벽 시공을 위한 줄파기 결과 대형 상수도관(D2200, D800)이 간섭되나 이설공간이 협소하여 이설이 어려우므로 지장 상수도를 이설하지 않고 옹벽 구조물을 변경하고 보도육교를 신설코자 검토 보고함.

Ⅰ		관련근거

○ 응봉감 제14-155호(’14. 5.27.) :시점부 우측옹벽 변경 실정보고

○ 천일(구조) 제2014-964호(‘14.6.2) : 시점부 옹벽변경에 대한 원설계자 의견

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동 (응봉교)

○ 규    모 : 확     장 - 폭4차로 → 6차로, 연장 625m

성능개선 - DB18 → DB24

○ 사업기간 : 2008. 10. 20 ~ 2015. 12.31.

○ 총사업비 : 78,536백만원 [도급비 : 45,595백만원]

○ 감 리 사 : (주)건화 외1      ○ 시 공 사 : 한신공영(주) 외1

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 현황 및 문제점

- 응봉교 시점부 우측옹벽 시공시 옹벽기초와 대형상수도관(D2200, D800)이 간섭되어 상수도관 이설 또는 공법변경 필요

- 상수도 사업본부 협의결과 구조물과 상수관로의 최소 이격거리(50cm) 준수 및 상수관로 파손시 작업공간 확보를 위해서는 기존의 캔틸레버 공법으로는 시공 불가함.

- 캔틸레버 옹벽구조 변경시 별도의 보행동선 확보 필요.

○ 지장물 간섭 현황도

○ 단면별 상수도관 간섭 현황

단면"A-1"	단면"A-2"	단면"B"	단면"C"

○ 시점부 우측옹벽 변경계획

- 당초 : 캔틸레버식 R.C옹벽 → 변경 : R.C옹벽 + 보도육교

- 현 황 도

	상수관(D800) 500MM이상 이격 상수관(D800) 기존옹벽 변경옹벽 깊이 : 1.1M 영구앵커

- 주요 변경내역

구 분	당 초	변 경(안)	비 고
시점부 우측 옹벽	․ 공법 : 캔틸레버식 R.C옹벽 ․ 옹벽 길이 : 72.8m ․ 상수도관(D800) : 옹벽기초 간섭	․ 공법 : R.C옹벽+보도육교 ․ 옹벽 길이 : 62.5m ․ 보도 육교 : 1개소(L=8.0m)

	<<원설계자 의견>>
지하매설물 저촉 배제 및 원활한 교통처리, 유관기관 협의결과를 반영하고 시공성을 고려한 현장여건에 따른 변경으로 책임감리원의 설계변경 검토안은 타당한 것으로 사료됨.

○ 시점부 우측보도 이동동선 변경 현황

당 초
변 경

○ 공사비 증․감 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
옹벽공사비	146백만원	155백만원	관급자재비 포함
보도육교설치비	-	330백만원
소 계	146백만원	485백만원	증) 339백만원

※ 지장상수도를 이설할 경우 공사비 331백만원 소요

Ⅳ		조 치 계 획

○ 감리단 보고내용을 검토한바 시점부 우측옹벽 변경사유가 타당한 것으로 판단되므로 우선 시공후 추후 설계에 반영하여 정산코자 하며

○ 보도 육교는 추후 디자인 심의결과에 따라 상세 설계후 설계에 반영코자 합니다.

붙임 : 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 설계내역서 및 도면 각 1부(별첨).   끝.