문서번호	방재시설부-4043
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	★방재시설부장
임봉규		신용우	06/03 박종웅
협조	광역도로과장		최광무
	주무관		정문수

남부순환로~오정대로간 도로개설공사(조경) 실정내용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

〔방재시설부〕

『남부순환로~오정대로간 도로개설공사』

감리사 실정내용 검토보고

남부순환로~ 오정대로간 도로개설공사 시행중 육군제 5602부대

요구사항(조경)에 대한 감리사 실정보고 검토결과임.

Ⅰ		관련문서

○ 천호수 제 2014-338(2013.05.22)호 : 실정보고(육군 제5602부대 설계변경                                          요청사항) 승인요청

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사

○ 위    치 : 시점 - 강서구 외발산동 메이필드 호텔앞 교차로

종점 - 부천시 오정구 고강동 봉오대로 삼거리

○ 규    모 : 도로개설 폭40m 8차로, 연장1.23km

(서울 970m, 부천 260m)

○ 공사기간 : 2010.9.29 ~ 2014.10.7(1,470일)

○ 도 급 액 : 9,767백만원(조경954백만원)

○ 시 공 사 : 보훈종합건설(주)

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링

○ 조경공사

- 수목식재 : 교목 - 왕벚나무외 7종 1,075주

관목 - 조팝나무외 4종 24,650주

- 지장수목이식 : 느티나무외 12종 1,586주

- 지장수목제거 : 버즘나무외 11종 130주

Ⅲ		실정내용 및 검토결과

구 분	실정보고(감리)	검토결과	비 고
수목식재	- 군부대 시설물 차폐수목 (군사보안)식재요청 · 느티나무(R15) 55주 ※ 도로개설공사에 육군 제5602부대 부지1,323㎡가 저촉되어 편입 협의하였으며, 군부대 추가 요구사항임.	- 도기본(토목부), 군부대, 감리단, 시공사 기 협의 한 사항으로 군부대 추가 식재요청사항 반영	승 인

Ⅳ		물량 및 공사비

□ 물량변경내역

(단위:천원)

구 분	당 초		변 경		증·▽감	비 고
	주요 내용	금 액	주요 내용	금 액
수목식재	-	-	․ 느티나무(R15) 55주	32,993	증32,993
직공비계		0		32,993	32,993

□ 공사비 증감내역

공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	143,369	176,362	32,993
제경비	28,730	35,918	7,188
도급액	189,310	233,510	증 44,200	부가세포함

(단위 : 천원)

Ⅴ		검토의견

○ 감리 실정내용과 같이 협의완료한 군부대 요구사항을 승인하고 변경 내역에

대하여는 설계변경 심의소위원회 심의를 득한후 설계변경에 반영코자 함.

붙  임 : 내역서 1부. 끝.