투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	관악산 저류조 설치공사 책임감리단
(경유)
제목	감리원 배치기간 변경 통보

우리부 시설공사인 「도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 전면책임감리용역 」의 보조감리원을 당초 노천강당 완료예정일(5.31)에 철수토록 계획하였으나 노천강당 수문실 및 유지관리도로(U-TYPE램프)가 공사중에 있어 철수일을 1개월(6.30) 연기하고자 함을 통보하오니 공사장 품질 및 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
★주무관							조동협			방재시설과장					서관석					방재시설부장					06/03 박종웅
협조자
시행			방재시설부-4042									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/
전화		02-3708-8774						/전송			02-3708-8756					/													/	대시민공개