문서번호	방재시설부-4115
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김상용		박희천	06/03 박종웅
협 조
	환경설비과장			이달영
	조경시설과장			신용우
	주무관			김정선
	주무관			임성은

마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

설계변경(전체6회, 3차3회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

도시기반시설본부

(방재시설부)

마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

설계변경(전체6회, 3차3회) 검토보고

“마곡지구내 재생수공급시설 설치공사”와 관련하여 역세척수관로 노선변경 등 9건에 대한 실정보고 승인사항 반영 및 공사일시정지에 따른 3차공사의 기계공사물량 차수이월에 따른 설계변경(전체6회, 3차3회) 적정성 검토 보고임.

관련근거

○ 도화(감리)2014-9215호(2014.06.02) 『전체6회, 3차3회 설계변경 도서제출』

공사개요

○ 공 사 명 : 『마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사』

○ 공사규모 : 재생수공급 20,000톤/일

○ 공사기간 : 2011. 11. 01 ~ 2016. 07. 31

○ 사 업 비 : 금6,868,462천원

○ 시 공 사 : 주)유호산업개발

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1

설계변경

[전체6회]

○ 변경사유 : 실정보고 승인사항 9건 반영

○ 주요 변경내용

공 종	설계변경 주요내용	공 사 비 (백만원)	비 고
토 목	1) 역세척수관로 노선변경 ・역세척수관로 노선 변경에 따른 관로 길이 및 토공수량 변경	감 1	방재시설부 2014 SMIH-14-18273 (2014.02.24)호
	2) 공기연장에 따른 가설사무실 기간연장 ・공기연장에 따른 가설사무 및 콘테이너 사무실 반영 가설사무실 24개월 ⇒ 28개월 콘테이너 사무실 0개월 ⇒ 3개월	증 8	방재시설부 2014 SMIH-14-22468 (2014.04.09)호

공 종	설계 변경 주요내용	공 사 비 (백만원)	비 고
토 목	3) 서남환경 요구사항 반영 ・관로공사 구간 포장 및 경계석 노후로 인한 일부 전폭 포장 및 화강경계석 교체 ・현장 실측에 의한 포장두께 조정	증7	방재시설부 2014 SMIH-14-26492 (2014.05.16)호
	4) 유입수 공급 방안 변경 ・유입수 공급 방안 변경으로 유입펌프장 삭제 및 유입관로 길이 감소(856m ⇒ 734m), 유입수 임시 공급배관 및 펌프설치	감121	방재시설부 2014 SMIH-14-26494 (2014.05.16)호
	5) 조경석 쌓기 및 안전난간 설치 등 ・조경마운딩 구간 중 출입구 구간 주변 사면 안정을 위한 조경석 쌓기 반영 ・계단실 상부 캐노피 및 외부환기구에 추락 방지를 위한 안전난간 설치 ・철근 할증 수량에 대한 고재처리 반영	증10	방재시설부 2014 SMIH-14-27070 (2014.05.22)호
	6) 잡철물 수량누락분 반영 외 ・잡철물(난간, 사다리, 출입문, 그레이팅) 및 방수수량 누락분 반영 ・노출콘크리트 마감(합성목재루버) 추가 반영 ・공기압축기실, 펌프실 흡음판 삭제 ・관로공사 시험굴착 및 수압시험 반영	증9	방재시설부 2014 SMIH-14-27611 (2014.05.27)호
	7) 업무지시(경계석 및 휀스교체) ・관사앞 도로 노후된 경계석 및 노후휀스 교체	증12	방재시설부 2014 SMIH-14-27628 (2014.05.27)호
	8) 강관동바리 변경 ・높이 6m이상 강관동바리 → 조립식 강관동바리로 변경	증18	방재시설부-4067호(2014.06.03)
조 경	9) 수목식재 수량 변경 ・교목 49주 ⇒ 255주, 관목 2,440주 ⇒ 2,400주 ・초화류 1,900본 ⇒ 2,150본 ・지피류 4,569㎡ ⇒ 4,542㎡	증24	방재시설부-505호 (2014.03.24)
제 경 비	・제경비율 반영	감 25
물가변동	1식	감 6
도 급 비		감 65	부가세 포함
관 급 비	・철근, 레미콘, 아스콘 수량조정	감 252
폐 기 물	・관로 수량 변경 및 포장 두께 변경 반영	감 31
총공사비		감 348

◦ 설계변경 내역

【단위 : 원】

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
전체공사 (6회변경)	총공사비	12,634,042,340	12,285,643,522	-348,398,818
	도 급 비	6,868,462,000	6,803,140,000	-65,322,000
	관급자재비	5,382,133,340	5,130,125,322	-252,008,018
	폐기물처리비	77,447,000	46,378,200	-31,068,800
	시운전비	306,000,000	306,000,000	0

[3차3회]

○ 변경사유 : 실정보고 승인사항 9건 반영 및 기계공사 물량제외(차수이월)

○ 주요 변경내용

공 종	설계 변경 주요내용	공 사 비 (백만원)	비 고
토 목	1) 역세척수관로 노선변경 ・역세척수관로 노선변경에 따른 관로길이 및 토공수량 변경	감 1	방재시설부 2014 SMIH-14-18273 (2014.02.24)호
	2) 공기연장에 따른 가설사무실 기간연장 ・공기연장에 따른 가설사무 및 콘테이너 사무실 반영 가설사무실 24개월 ⇒ 288개월 콘테이너 사무실 0개월 ⇒ 3개월	증 8	방재시설부 2014 SMIH-14-22468 (2014.04.09)호
	3) 서남환경 요구사항 반영 ・관로공사구간 포장 및 경계석 노후로 인한 일부 전폭 포장 및 화강경계석 교체 ・현장 실측에 의한 포장두께 조정	증 7	방재시설부 2014 SMIH-14-26492 (2014.05.16)호
	4) 유입수 공급 방안 변경 ・유입수 공급방안 변경으로 유입펌프장 삭제 및 유입관로 길이감소(-122m), 유입수 임시공급배관 및 펌프설치	감 184	방재시설부 2014 SMIH-14-26494 (2014.05.16)호
	5) 조경석 쌓기 및 안전난간 설치 등 ・출입구구간 주변 사면안정을 위한 조경석 쌓기 반영 ・계단실상부 캐노피 및 외부환기구에 추락방지를 위한 안전난간 설치 ・철근 할증수량에 대한 고재처리 반영	증 10	방재시설부 2014 SMIH-14-27070 (2014.05.22)호
	6) 잡철물 수량누락분 반영 외 ・잡철물(난간, 사다리, 출입문, 그레이팅) 및 방수 수량 누락 반영 ・노출콘크리트 마감(합성목재루버) 추가 반영 ・공기압축기실, 펌프실 흡음판 삭제 ・관로공사 시험굴착 및 수압시험 반영	증 9	방재시설부 2014 SMIH-14-27611 (2014.05.27)호

공 종	설계 변경 주요내용	공 사 비 (백만원)	비 고
토 목	7) 업무지시(경계석 및 휀스교체) ・관사앞 도로 노후된 경계석 및 노후 휀스 교체	증 12	방재시설부 2014 SMIH-14-27628 (2014.05.27)호
	8) 강관동바리 변경 ・높이 6m이상 강관동바리 → 조립식 강관동바리로 변경	증18	방재시설부-4067호 (2014.06.03)
조 경	9) 수목식재 수량 변경 ・교목 49주 ⇒ 255주, 관목 2,440주 ⇒ 2,400주 ・초화류 1,900본 ⇒ 2,150본 ・지피류 4,569㎡ ⇒ 4,542㎡	증 24	방재시설부-505호 (2014.03.24)
기 계	10) 기계공사 물량제외 ・기계공사 물량제외(차수이월)	감 679
제 경 비	・1식	감 377
물가변동	・기계공사 차수 이월에 의한 변경	감 51
도 급 비		감 1,204	부가세 포함
관 급 비	・기계공사 차수이월에 따른 관급자재 내역 변경 ・철근, 레미콘, 아스콘 수량조정	감 1,485
폐 기 물	・관로 수량 변경 및 포장 두께 변경 반영	감 5
총공사비		감 2,694

◦ 설계변경 내역

【단위 : 원】

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
3차공사 (3회변경)	총공사비	6,860,800,730	4,167,028,400	-2,693,772,330
	도 급 비	4,002,900,000	2,799,000,000	-1,203,900,000
	관급자재비	2,828,091,010	1,342,900,000	-1,485,191,010
	폐기물처리비	29,809,720	25,128,400	-4,681,320

검토 및 조치계획

○ 감리단으로부터 제출된 설계변경도서를 검토한 바, 기 승인받은 실정보고 승인사항 반영 및 공사정지(2014.6 ~ 2014.12)로 인한 3차공사의 기계공사 물량제외 사항으로,

○ 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단됨으로 감리단 보고내용과 같이 설계변경(전체6회, 3차3회)을 시행코자 함.

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 변경내역서(전체6회, 3차3회) 1부. 끝.