다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2013 행정포털 개선사업 주간보고 (23주)

2013 행정포털 개선사업의 23주차 추진실적을 보고 드리고자 합니다.

○ 추진기간 : 2014. 5. 12. ~ 5. 16.  (23 / 26주차)

○ 추 진 율 : 83% (계획 84%)

○ 추진실적

- 사업관리 : 83% (계획 83%)

· 산출물 보완 및 중간보고 자료 작성

· 추가 요청사항 검토 및 모바일오피스 협의 등

- UX/UI 컨설팅, 인프라 구성 : 100%

- 시스템 개발 : 88% (계획 88%)

· 전체 퍼블리싱 및 UX전환, 메인화면 개인화, 게시판 : 완료

· 2차 단위/통합 테스트에 따른 시스템 보완(오류처리, 기능변경)

· 관리자 화면 디자인 및 퍼블리싱 진행

· 통합검색 : Open-API 코드 개발, 테스트 및 오류수정

· 모바일오피스 : 분석 및 요건 정의, 디자인 시안작성

- 시험 및 운영 안정화 : 55% (계획 60%)

· 3차 단위/통합 테스트 준비

· 2차 테스트 결과에 따른 작업 계획 보완

· 3차 성능테스트 준비 (5/16 21시 ~ 5/17 07시)

붙임:  주간업무보고서(23주차) 1부.  끝.

주무관	김대원		프로젝트관리팀장	김기항		정보시스템담당관	06/05 代김기항
협조자
시행	정보시스템담당관-6980	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 3층 정보시스템담당관	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2986	/전송	02-2133-1071	/	doomsday@seoul.go.kr	/	대시민공개