함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 책임감리원
(경유)
제목	실정보고 승인 통보(올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사)

1. 건올감 2014-160,161호와 관련입니다.

2.『추모표지석 설치』,『전기방식공 외부전원 공급 누락』건 실정보고에 대하여 아래와 같이 승인 하오니 감리업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추모표지석 문구 수정

『․․․ 이중화 부설공사 중 2013.7.15. 터널침수 사고로․․․』

나. 추모표지석 받침 높이 조정 : 10㎝ → 15㎝

다. 추모표지석 위치는 최대한 경견하고 조용한 장소에 설치

※ 동작구청에서 진행중인 공원조성 계획과 연계하여 장소 결정.

라. 전기방식 판넬 위치를 동작구청 공원녹지과에서 진행중인 공원조성 계획을 확인 후 관로와 최대한 가까운 거리에 설치하여 옥외 전선관 및 전선 연장을 최소화 할 것.

첨부 : 실정보고 검토 보고서 각 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	라승보		고도정수반장	전결 06/05 이임섭
협조자
시행	고도정수반-2037	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1456	/전송	3146-1529	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개