투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선 2단계 구간 시운전 5주차(‘14.6.9~6.13) 시운전계획 송부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지하철 9호선 2단계구간 5주차(‘14.6.9 ~ 6.13) 시운전계획을 아래와 같이 송부하오니 시운전 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 5주차 시험기간 : 2014. 6.9.(월) ~ 6.13.(금)

○ 시험구간 : 9호선 2단계 926정거장 ~ 930정거장

○ 시험내용 : 신호 TDC 시험

- CBI 운행제어시험 및 1,2단계 구간 연동시험 등

○ 협조사항

- 925~928정거장간 신호연동시험 및 궤도용접작업

일자	작업내용	작업시간	협조사항	비고
6.09	∘925 신호 및 통신기계실 광통신 설치	1단계 차량운행 종료 후 (00:40~04:30)	∘925신호 및 통신기계실, 선로 출입
6.10	∘1단계 및 2단계 궤도 용접작업(상선) ∘925,928 SDTC튜닝 ∘TU-box 및 S본드 철거등	01:30~04:30	∘925 신호기계실 , 선로 출입 ∘925 궤도회로 B12T 이전에 차량 주박	열차주박 위치 변경
6.11	∘1단계 및 2단계 궤도 용접작업(하선) ∘925,928 SDTC튜닝 ∘TU-box 및 S본드 철거등	01:30~04:30	∘925 신호기계실 , 선로 출입 ∘925 궤도회로 B10T 이전에 차량 주박	열차주박 위치 변경
6.12	∘광통신시험 ∘925~928 사전연동시험(925 ROM교체)	01:30~04:30	∘925신호 및 통신기계실, 선로출입
6.16~19	∘925~928구간 TDC시험	01:30~04:30	∘925신호기계실 및 선로 출입	925역 주박 위치 변경

- 차량 및 기관사 지원, 차량정비 등

∘ 차량출고 : ‘14. 6.9(월)

∘ 차량입고 : ‘14. 6.13(금)

→ 시험종료후 1단계구간 하선 유치선 유치후 차량기지 입고. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울시메트로9호선(주),서울9호선운영(주),(주)메인트란스
주무관	정해철		차량과장	임정규		도시철도설비부장	06/05 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-5118	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 삼일대로 231(예장동 산 5-85) 서울시청 남산별관	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개