투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	해마건설(주) 송흥섭
(경유)
제목	2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사 변경 작업지시(제3차)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사 제3차 작업지시 내역의 작업내용을 변경할 부분이 발생하여 변경 시공토록 지시하니 시공에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사(연간단가)

나. 계약기간 : 2014. 03. 27 ~ 2015. 02.28

다. 제3차 작업지시 변경

1) 작업기간 : 2014.05.30 ∼ 2014.06.30.(변경없음)

2) 소요금액

- 당 초 : 11,102,000원

- 변 경 :  8,964,000원

2) 작업지시 변경

연번	장 소	작업지시내용		비 고
		당 초	변 경
1	서빙고초교 입구	시선유도봉 설치(20개)	도로표지병 설치(15개)	서빙고로
2	양화대교 북단	시선유도봉 설치(50개)	도로표지병 설치(40개)	양화로

라. 작업지시 변경 사유

- 국토교통부 도로안전시설 설치 및 관리 지침 시선유도봉 설치 기준에 부합하여 도로표지병으로 설치.

붙임 : 1. 제3차 작업지시 변경내역서 1부.

2. 제3차 작업지시 변경도면 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	권세봉		도로보수과장	06/05 이규철
협조자	주무관	代이상하
시행	도로보수과-5219	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동 825번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8354	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개