투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(하천관리과장)
(경유)
제 목	2014년 예산(감리비) 재배정 및 추가확보 요청(신림2 펌프장)

1. 방재시설부-2544호(2014.05.01.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『신림2 빗물펌프장 설치공사 전면책임감리용역』에 대한 2014년 예산를 다음과 같이 재배정 및 추가확보 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 재배정 요구내역

(단위 : 천원)

구 분	‘14년 예산액	기 배정액	금회 재배정 요청액	배정잔액	재배정부서
계	7,223,000	7,029,100	193,900	0	방재시설부
시 설 비	7,029,100	7,029,100	0	0
감 리 비	193,900	0	193,900	0

※  기 배정액 7,029,100천원 중 2,869,604천원은 도시기반시설본부 설비부로 배정

나. 감리용역 예산 추가확보 요구내역

(단위 : 천원)

계약금액			추가예산 확보요청액	비고
당초	변경	증
751,900	976,000	224,100	148,100	공사기간 연장에 따른 추가예산 확보 필요 전면책임감리용역 설계변경 보고서 참조

※  감리용역 계약금액 증가분 224,100천원 중 76,000천원은 별도 예산으로 기 확보

첨부 : 1. 예산 재배정 요청서 1 부.

2. 책임감리용역 설계변경(전체1회 및 1차1회) 보고서 1 부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이정국		방재시설과장	서관석		방재시설부장	06/05 박종웅
협조자
시행	방재시설부-4165	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 제2 청사 3층	/
전화	3708-8690	/전송	3708-2599	/	jung55g@seoul.go.kr	/	대시민공개