문서번호	도로계획과-7263
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로시설계획팀장	도로계획과장		시설안전정책관
이성주	한정수	형태경		06/09 정시윤
협 조
	광역도로과장		최광무

- 율곡로(창경궁앞) 구조개선 -

사업비 조정 검토보고

2014. 06.

도시안전실

도로계획과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

- 율곡로(창경궁앞) 구조개선 -

사업비 조정 검토보고

“율곡로(창경궁앞) 구조개선공사”에 대한 효율적인 예산집행을 위하여  ‘14년 공사비중 일부를 보상비로 변경 사용코자 보고 드림.

1		사업개요

○ 위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동 사거리

○ 규    모 : 폭 4→6차로, 연장 800m(지하차도 342m 포함)

○ 사업기간 : 2008. ~ 2015.

○ 총사업비 : 55,557백만원

2		추진현황

(공사중 36%)

○ ‘09.02.~’10.05. : 기본 및 실시설계 시행

○ ‘10.08.19.    : 도시계획시설사업 실시계획인가

○ ‘10.10.11.    : 공사 계약(시공사:북일종합건설외 2)

○ ‘11.02.28.    : 공사중 종점부 실시설계 1차 변경(민원)

○ ‘11.12.23.    : 문화재 정밀발굴조사(담장기초석 발굴) 완료

○ ‘13.07.15.    : 문화재현상변경허가(문화재 원형복원)

○ ‘14.04.22.    : 문화재현상변경에 따른 설계변경 심의(통과)

○ ‘14.05.30.    : 보상관련 예산 추가배정 요청(종로구)

○ ‘14. 6월 현재  : 종묘측 보도박스 매스콘크리트 타설중

3		연차별 투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2013예산	2014예산	2015이후
계	55,557	26,670	10,484	2,300	16,103
실시설계비	970	970	0	0	0
보상비	12,487	8,000	2,487	700	1,300
시 설 비	40,800	17,200	7,597	1,250	14,753
감 리 비	1,300	500	400	350	50

4		조정 사유

○ ‘14년 보상업무에 필요한 사업비 3,850백만원 중 기 확보된 예산은 3,187백만원으로 효율적인 보상추진을 위하여 663백만원 추가 확보 필요

○ ‘14년 편성된 공사비 예산 1,250백만원 중 663백만원을 보상비로  조정필요

(단위 : 백만원)

구 분	당초예산			변경예산	증․감	비고
	계	‘13 사고이월	‘14 예산
계	11,734	9,434	2,300	11,734	-
보상비	3,187	2,487	700	3,850	증 663
공사비	8,122	6,872	1,250	7,459	감 663
감리비	425	75	350	425	-

5		조치계획

○ ‘14년 공사비로 도시기반시설본부(토목부)에 배정된 1,250백만원중 663백만원에 대하여 보상비로 집행부서인 종로구에 재배정.

붙임 : 예산추가 재배정 요청 공문(종로구)  1부.  끝.