문서번호	물재생계획과-7251
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	하수계획팀장	물재생계획과장		물관리정책관
김재승	이도우	이진용		06/09 정만근
협 조
	하수정비팀장		심형보
	하수관리팀장		최승각

마곡지구 하수관로 정비공사 시설물 사전 예방점검 실시계획

2014. 6.

도 시 안 전 실

(물재생계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	강서구청 치수방재과	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

마곡지구 하수관로 정비공사

시설물 사전 예방점검 실시계획

마곡지구 하수도 시설물에 대한 사전 예방점검을 통해 인수인계시 문제점이 발생되지 않도록 만전을 기하기 위함.

□ 마곡지구 사업개요

○ 위    치 : 강서구 마곡동, 가양동, 방화동, 공항동 일원

○ 면    적 : 3,665,086㎡

구 분	면적(㎡)	공정률(%)	주요 추진내용
1공구	1,536천	71.65	상수․하수관로, 도로설치(단지조성)
2공구	1,294천	54.99%	상수․하수관로, 도로설치(단지조성)
3공구	835천		미발주

○ 사업기간 : 2007.12.~2014. 12.

○ 주택규모 : 공동주택 16개 단지 12,015세대

○ 하수시설

구 분	규 모	공정률(%)	주요 추진내용
1공구	지선 : 21,189m	72.6	우수관로 : 14,278m 오수관로 : 9,570m 합류관로 : 1,296m
	간선 : 13,287m	73.5
2공구	지선 : 18,586m	19.7%	오수관로 : 3,449m 우수관로 : 4,991m
	간선 : 10,992m	43.5%
3공구	지선 : 675m		하수관로설치 미착공
	간선 : 1,700m

※ 지선(D 900㎜미만) : 10년 빈도

※ 간선(간선 및 박스)  : 30년 빈도

□ 점검 개요

○ 일    시 : 2014. 6. 10(화) ~ 6. 17(화) <기간중 6일>

○ 점 검 자 : (市) 물재생계획과, (區) 강서구청 안전치수과 합동

구 분	점검조장	점검 조원	입회자
1공구	강서구청 하수팀장	시청 : 이원영 구청 : 황대일	SH공사
2공구	물재생계획과 하수관리팀장	시청 : 신중선 구청 : 박성근	SH공사

○ 점검대상 : 마곡지구내 하수관로 신설공사

○ 점검방법 : 시·구 2인 1조 2개조 편성 합동점검 실시(SH공사 입회)

○ 주요 점검내용

- 시공 중인 하수관로 중점점검 항목

· 굴착시 안전성 및 시공성 준수 여부

· 흙막이 공법 설계도서 준서 여부

· 관 접합시 수리학적으로 유수 흐름이 원활하게 유하 가능 여부

· 하수본관·빗물받이·가정배수관 등 관 연결 상태

· 맨홀 시공 적정성

· 기존 지하 매설물 처리상태

· 현장 반입자재 관리실태 및 자재 품질 확인 적정성 여부

- 시공 완료된 하수관로 중점점검 항목

· 관로 연결상태

· 관로 경사도 적정 여부

· 수밀검사 여부 및 검사 적정성 확인

· 관로 내부 이상유무 확인 여부

(D1,000㎜ 미만 CCTV조사,  D1,000㎜이상 육안조사)

· 맨홀 내부 시공 상태(인버트설치 여부, 점검사다리 등)

· 관로내 타관시설 통과 여부 등

· 연결 관로 마감 상태 및 관로내 누수여부 확인 등

□ 행정계획

○ 시설물 점검 전 마곡사업추진단 및 SH공사에 점검계획을 통보하여 협조 요청하고

○ 점검시 지적사항에 대해서는 발주기관인 SH공사에 통보 후 조치결과를 제출토록 통보하며,

○ 점검기간중 전문가 의견이 필요시 전문가 합동점검 실시 예정

붙임 : 1. 마곡지구 배수계획 현황 1부

2. 점검결과(보고양식).  끝.