문서번호	하천관리과-9380
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장		물관리정책관
이병우	지세진	한유석		06/09 정만근
협 조
	자연생태과장		김재경

「청계천 생태환경 개선 사업」

기본 및 실시설계 용역 추진계획

2014. 06.   .

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「청계천 생태환경 개선 사업」

기본 및 실시설계 용역 추진계획

청계천시민위원회에서 건의한『청계천 생태환경 개선사업』에 대한  「기본 및 실시설계 용역」을 추진코자 함

□ 추진 근거

○ 2014. 3. 12 : 청계천시민위원회에서 기자설명회를 통해 청계천 개선보완 필요성을 서울시에 건의

□ 추진 배경

○ 청계천 상류구간은 시민들이 물놀이를 즐기는 구간으로서 BOD등은 수질기준에 만족하나, 1년중 4개월정도는 대장균 수질기준에는 만족하지 못하고 있는 실정임

- 청계천의 물놀이 구간에 대장균군수가 높은 이유는 합류식 하수관거 월류수가

미처리된 상태로 청계천 유입

○ 청계천의 수심유지를 위하여 설치된 여울보로 인한 물흐름의 정체는 여름철 수질악화 및 하천의 종적 연속성 단절 요인

○ 청계천 저수로내에 식생방틀을 고정시키고 그위에 식물을 식재하여 저수로가 움직일 수 없는 형태로 조성된 구간 개선필요

○ 중랑천권역 하천기본계획(국토관리청, 2012.7월)에서 청계천 하류구간 일부제방의 법적여유고가 부족한 것으로 나타남에 따른 대책필요

○ 청계광장 ~ 황학교 구간(4km)은 하상 차수제가 설치되어 하천수와 지하수가 분리되어 물순환이 불가하므로 수생식물들의 서식이 곤란 하므로 개선필요

○ 청계천 하류구간 홍수터(고수부지) 및 제방부지 수림대 조성 필요

□ 추진 경위

○ 청계천 개선·보완 선언(청계천 투어시 ‘12. 2. 28)

- 청계천의 역사성 및 생태성 개선·보완을 위해 청계천시민위원회 구성·운영

○ 청계천시민위원회 구성·논의(‘12. 3 ~ ‘14. 1월)

- 청계천시민위원회(전체회의11회, 3개 분과회의 각8회)에서 개선보완 방안논의

○ 청계천 개선보완 학술연구 용역추진(‘13. 3 ~ ‘14. 2월)

- 청계천 역사성 및 자연생태성 회복(청계천시민위원회 주관, 서울연구원 시행)

○ 청계천 역사성 및 자연생태성 회복 건의(청계천시민위원회, ‘14. 3. 12)

- 청계천시민위원회에서 자설명회를 통해 청계천 개선보완 필요사항을 서울시에 건의

○ 청계천 개선보완 마스터플랜 학술연구 용역결과 및 향후계획(부시장방침제144호)

- 수표교 원위치 복원 및 지천 복원 : 타당성조사 추진

- 청계천 본류구간 생태복원 : 기본 및 실시설계 추진

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 「청계천 생태환경 개선」 기본 및 실시설계 용역

○ 위    치 : 청계천(청계광장 ~ 중랑천 합류점)

- 폭 19.5 ~ 203m, 연장 8.12km

○ 용역기간 : 2014. 7 ~ 12월 (착수일로부터 180일)

○ 소요예산 : 190,100천원

- 청계천 개선보완 사업 설계비(550,000천원)중 일부사용

○ 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 하천 복원 및 정비,

청계천 개선보완 사업, 시설비(100-401-01), 설계비

○ 과업내용

공종	규모	위치	과업 내용 설명
수질정화 설비(AOP) 설치	마이크로버블 산화 및 UV소독설비설치	청계광장 하부	° 청계광장 하부 계곡수(백운동천, 삼청동천), 지하철(경복궁역,광화문역) 배출수 차집시설 폐쇄 및 정화처리후 청계천 유입
CSOs 월류 저감방안		모전교~광통교	° 대형건물 오수 펌핑으로 인한 CSOs 월류수 청계천 유입 방지대책 마련
하천시설물 개선 설계	여울보개선 29개소 진출입경사로 2개소 저수하안 개선	청계천 일원 모전교~광통교, 수표교~관수교	° 여울보 개선(일부제거)을 통한 사행유도 ° 이용자가 많은 구간에 경사로를 추가설치 하여 사용성 향상
홍수방지벽 설계	L=1,441m, H=0.5~1.0m	고산자교 ~ 살곶이공원	100년빈도 홍수량에 대한 법정 여유고 확보
차수씨트 천공 설계	∅=0.2m, H=2m, 20,000공	청계광장~ 황학교 (연장 4,000m)	자연하상으로 회복하기 위하여 하상차수제에 일정간격으로 구멍을 뚫음
수목식재 설계	A = 20,000㎡	황학교~중랑천 합류점	홍수터(고수부지), 제방부지

□ 용역 발주계획

○ 시행방법 : 기술용역 시행(기본 및 실시설계)

○ 입찰방법  : 제한경쟁 입찰(서울특별시, 적격심사)

○ 참가자격  : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의거 아래 “가”,“나”항의 자격을 갖추고, 주된 영엽소가 서울특별시에 소재한 업체

가. 엔지니어링산업진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제33조의 규정에 의거 입찰공고일 현재 산업통상자원부 건설부문[수자원개발(업종코드 3586), 측량(업종코드 3589), 조경(업종코드 3584), 상하수도(업종코드 3587), 전기설비(업종코드 3570)]의 엔지니어링 활동 주체로 신고를 필하고 해당기술자를 보유한 업체〔자격보완을 위한 공동도급(2개업체 분담이행방식)을 허용하며, 대표사의 분담 비율은 51%이상, 구성원의 최소분담비율은 10%이상으로 합니다〕

나. 입찰 공고일 기준 3년 이내 단일 건 3천만원 이상 규모의 디자인(시각, 산업, 서비스, 커뮤니티, 환경 디자인분야) 실적이 있는 업체

□ 향후 추진계획

○ 2014. 6월 초 : 타당성조사 및 기본계획 용역방침

○ 2014. 6월 중 : 기술용역 타당성심사 및 발주 공고의뢰

○ 2014. 6월 말 : 계약(지역제한 경쟁입찰, 적격심사)

○ 2014. 7 ~ 12월  : 기본 및 실시설계 용역 시행

- 용역 진행 단계별 청계천시민위원회 보고 : 착수보고, 중간보고, 최종보고

- 용역과정에서 관계기관(부서) 협의 : 서울시 및 자치구 관련부서

○ 2014. 9월 이후 : 기본 및 실시설계 용역 결과에 따라 10월투자심사

붙임 : 1) 과업내용서(안)

2) 산출내역서 1부. 끝.