문서번호	시설관리과-12018
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강서수도사업소장
서장원	황혁기	이자원		06/09 이상래
협 조

설 계 변 경 계 획(최종)

(2013년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사)

2014. 6

강서수도사업소

(시설관리과)

설 계 변 경 계 획(최종)

우리사업소에서 시행중인 “강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사”와 관련하여 신규공종 및 물량 증ㆍ감에 따라 아래와 같이 설계변경코자 함.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2013년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속)

나. 공사개요 : 누수복구 1,820개소, 불용관 및 노후관 정비 450개소

다. 계 약 일 : 2013. 5.  9

라. 착 공 일 : 2013. 5. 13

마. 준공기한 : 2014. 6. 30

바. 계약금액 : 금2,480,874,700원

사. 도 급 자 : 삼융종합건설(주)  백 준 호

2. 설계변경 사유

가. 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감에 따른 설계변경 시행

- 신규공종 : KP이탈방지압륜접합 (D=250㎜)외  63개 공종

- 물량증가 : 콘크리트 포장깨기(0.4㎥, 누수)외 260개 공종

- 물량감소 : 안전시설 설치 및 철거(지선)외 515개 공종

나. 주요공종 물량변경 내용

공 종	단 위	당초수량	변경수량	비고(증ㆍ감)
인력터파기(용수,협소) 견질토사 2-3m	㎥	-	1	증) 1
주름마디 스텐관 부설공(50mm 누수,야간)	개소	-	1	증) 1
KP 이탈방지압륜 철거(200mm, 누수)	개소	-	1	증) 1
클램프 접합공(600mm, 누수)	개소	-	2	증) 2
주철관 절단공(250mm, 누수)	개소	-	4	증) 4

공 종	단 위	당초수량	변경수량	비고(증ㆍ감)
작업차량비(연평균 1일 8건)	건당	1000	1,194	증) 194
교통정리원(야간)	hr	50	76	증) 26
조명시설 설치 및 철거(누수, 야간)	hr	60	103	증) 43
방진덮게 깔기(1m당)	개소	720	279	감) 441
안전시설 설치 및 철거(지선, 누수)	회	1,171	862	감) 309

다. 관급자재 물량변경 내용

- 신규공종 : 타이튼주철직관(Ø250)외 10개 공종 추가

- 물량증가 : 이탈방지압륜(Ø200)외 17개 공종 증가

- 물량감소 : 타이튼주철직관(Ø80)외 35개 공종 감소

3. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ㆍ 감
총 공 사 비		3,210,000,000	3,176,776,000	-33,224,000
도 급 비	총 원 가	2,255,340,636	2,253,900,000
	부 가 세	225,534,064	225,390,000
	계	2,480,874,700	2,479,290,000	- 1,584,700
관급자재비		181,202,000	127,686,000	-53,516,000
도로복구비 및 기타		547,923,300	569,800,000	21,876,700

4. 조치계획

- 신규공종 및 계약물량 증 ․ 감사항에 대하여 우리사업소 설계변경 심의위원회에

상정하여 심의 후 설계변경 시행.

따로붙임 : 설계변경내역서 및 신규공종 내역 1부.  끝.