문서번호	서울숲공원관리사무소-5143
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울숲공원관리사무소장	동부공원녹지사업소장
김종경		권오국	06/10 이춘희
협조	주무관		김덕수
	운영팀장		최원아

『2014년 서울숲 및 응봉공원 질서유지 관리용역』

설계변경 검토 보고

2014.  6.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

『2014년 서울숲 및 응봉공원 질서유지 관리용역』

설계변경 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『2014년 서울숲 및 응봉공원 질서유지 관리용역』시행 중 서울숲공원 성수기 토 , 일,  공휴일 이용객 급증으로 질서유지 경비용역 추가투입이 필요하여 아래와 같이 변경 시행하여 서울숲공원의 시설물보호 및 질서유지에 만전을 기하고자 합니다.

1		용 역 개 요	7

❍ 용 역 명 : 2014년 서울숲 및 응봉공원 질서유지 관리용역

❍ 용역기간 : 2014. 2.21 ~ 2015. 2. 20

❍ 도 급 액 : 금503,189,450원

❍ 도 급 자 : (주)다보산업관리   대표:정채열

❍ 용역내용 : 공원내 질서유지 및 시설물보호 순찰 등

- 서 울 숲 : 365일, 24시간(주간, 야간, 심야) 공원내 시설물보호 및 질서유지 등

- 응봉공원 : 365일, 16시간(야간, 심야) 공원내 시설물보호 및 질서유지 등

2		주요 변경내용	7

❍ 변경사유 : 성수기 토, 일, 공휴일 주간 상시 경비용역(3명) 및 사회복무요원이         병행하여 질서유지 순찰, 시설물 보호(화장실 등), 주차장내 주차유도 질서유지

체육시설(다목적구장, 테니스장 등) 및 동물사 출입문개폐, 노숙인 단속,

바닥분수, 놀이터 안전요원(안전사고 예방), 비행청소년 계도 등 공원질서유지

하였으나, 최근 사회복무요원 감소 및 문제점(정신질환, 신체허약, 질병 등)이

발생하여 성수기 토, 일, 공휴일 주간에 질서유지 경비용역 3명으로 질서유지

대처가 곤란하여 보강 5명을 추가투입(종전3명 → 8명)하여 공원내 질서유지

확립에 만전을 기하고자 함.

○ 추가 소요내용

- 경비용역 보강 투입일수 : 52일

(6월14부터 ∼ 11.16까지의 기간중 토, 일, 공휴일 주간시간대만 투입)

- 보강 투입인원 :  일일 주간(11:00～19:00)5명 (총260명)

3		설계변경 금액	7

: 524,483,630원(증액  21,294,180원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감	비 고
총 용역비		503,189,450	524,483,630	증 21,294,180
도급비	공급가액	457,444,955	476,803,300	증 19,358,345
	부가가치세	45,744,495	47,680,330	증 1,935,835
	계	503,189,450	524,483,630	증 21,294,180

※ 낙찰차액 : 70,021천원 활용

○  예산현황 : 600,000천원

- 발주금액 : 573,210천원

- 계약금액 : 503,189천원(낙찰차액 :  70,021천원)

- 예산잔액 :  26,790천원

4		예산과목	7

❍ 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상 및 도시녹화지원,

공원녹지관리수준향상, 동부공원녹지사업소산하공원유지관리, 공공운영비